투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경에 따른 재계약 의뢰(2014년 터널,복개 및 지하차도일상유지보수공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 『2014년 터널,복개 및 지하차도 일상유지보수 공사』에 대하여 따로붙임과 같이 설계변경(3회, 최종)을 시행하였기에 재계약 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 터널,복개 및 지하차도 일상유지보수 공사

나. 도 급 자 : 하이스트종합건설㈜ 대표 목진성

다. 공사기간 : 2014. 04. 15 ~ 2015. 02. 28

라. 계약금액 : 금404,679,000원

마. 설계변경사유 : 시공물량 증·감 및 제경비 정산 등에 따른 설계변경

바. 설계변경 내역                                       (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감
총 공 사 비		572,598,270	560,476,270	감) 12,122,000
도급비	계	404,679,000	392,557,000	감) 12,122,000
	공급가액	367,890,000	356,870,000	감) 11,020,000
	부가가치세	36,789,000	35,687,000	감) 1,102,000
관 급 비		160,400,290	160,400,290
이전비 및 기타		7,518,980	7,518,980

사. 예산과목 : 도로시설과, 도로시설관리, 도로시설물운영(도시개발특별회계),

도로시설물(터널,복개, 지하차도)일상유지보수, 시설비및부대비, 시설비

별 첨 :  1) 설계변경 시행방침 1부.

2) 설계변경 검토보고서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부.

4) 설계변경 검증확인서 1부.  끝.

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김형섭		시설보수과장	02/16 박춘배
협조자
시행	시설보수과-583	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 용답동 자동차시장길 41	/
전화	02)2210-1551	/전송	02)2210-1562	/	azkhs@seoul.go.kr	/	대시민공개