투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(정산) 시행(2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)-강서)

우리 사업소에서 시행중인 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)를 아래와 같이 설계변경(정산) 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도로,교통안전부속물 유지보수공사(연간단가)

나. 공사기간 : 2014. 4. 7 ~ 2015. 2. 28

다. 공사개요 : 과속방지턱 도색 24㎡, 콘크리트 단면보수 711㎡, 균열보수

21m, 시선유도봉 설치 908개 등

라. 도 급 자 : ㈜토형이엔시 대표 김용훈

마. 변경사유 : 작업물량 증 ․ 감

바. 변경내역

구 분		금 액		비 고(증·감)
		당 초	변 경
총 공 사 비		386,985,700	337,697,470	감) 49,288,230
도급비	공 급 가 액	240,180,000	214,360,000	감) 25,820,000
	부가가치세	24,018,000	21,436,000	감) 2,582,000
	계	264,198,000	235,796,000	감) 28,402,000
관급자재비		83,477,700	92,892,470	증) 9,414,770
이 전 비		39,310,000	9,009,000	감) 30,301,000

사. 예산과목 :

- 도로관리과, 도로시설물관리, 도로시설물안전관리 및 수준향상, 도로

및 도로부속물관리, 도로부속시설물일상유지관리, 시설비

- 교통운영과, 교통안전시설물관리, 교통안전시설물유지관리, 도로부속

교통안전시설물설치, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 방침서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부. 끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
주무관	김동민		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	02/16 代이은엽
협조자	주무관	윤신식		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1622	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개