투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	준공기한 연기의뢰 요청[서울 거리예술센터 조성 전기공사]

1. 자람(감리)-150213호(2015.02.13) 및 설비부-2032호(2015.02.16)와 관련입니다.

2. 우리 본부에서 시행중인 「서울 거리예술센터 조성 전기공사」에 대하여 준공기한 연기의뢰 요청을 하오니 조치하여 주시길 바랍니다.

가. 공사개요

- 공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 전기공사

- 공사기간 : ′14.10.13. ~ ′15.02.28.

- 도 급 비 : 금451,297,000원

- 계 약 자 : 스마트전력주식회사 대표 김재만

나. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
공사 기간	2014.10.13. ~ 2015.02.28	2014.10.13 ~ 2015.03.31	(증31일) 계약금액 변경없음 (선급금 지급있음)

※ 선급금 지급금액 : 금140,000,000원

다. 준공기한 연기사유

- 본 공사의 선행공정인 건축공사 준공기한 연기에 따른 후속 공정인 전기공사의 절대공기 부족으로 준공기한 연기 필요.

라. 귀책소재 : 발주처

마. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 공사기간 연기검토 보고서 1부.

2. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김두환		환경설비과장	유병기		설비부장	02/16 박기형
협조자	계약1팀장	김점선
시행	설비부-2066	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 2동(2층) 도시기반시설본부 설비부	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8621	/전송	02-3708-8659	/	buckgolje@seoul.go.kr	/	대시민공개