문서번호	토목부-3286
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
이석근		이승우	02/16 노우성
협조
	주무관		신복민

설계용역 정산에 따른 실정보고

(광복교~안양주변 도로확장 기본 및 실시설계)

2015. 2.

도시기반시설본부

(토 목 부)

설계용역 정산에 따른 실정보고

2012. 6. 5. 착수하여 추진중인 「광복교~안양교주변 도로확장 기본 및

실시설계용역」에 대하여 실정산에 따른 용역비 변경(감)사항이 있어

이에 대한 보고임.

용역개요

용역명 : 광복교~안양교 주변 도로확장 기본 및 실시설계

위  치 : 구로구 개봉동 ~ 구로IC

규  모 : 도로확장 B=23.75~27m(6차로), L=1.11km

- 교량 : 3개소/L=347m, 주변도로(확장) : L=763m

기  간 : 2012. 6. 5. ~ 2015. 2.28.

용역비 : 947,334천원

용역업체 : 경동엔지니어링외 2

용역추진현황

2006. 6.~ 2007. 11 : 안양교 기본설계 완료

2007.11.~ 2009.  2 : 안양교 실시설계 완료

2009. 3. : 서부간선도로 노선변경 사업유보

2012. 6. 5 : 실시설계용역 계약 및 착수

2013. 2.22 : 안양교 하천횡단 협의(국토관리청)

2013. 7.25 : 환경영향평가 및 노선계획 공람공고

2013.12.18 : 서울시민디자인 재심의(2013. 9.12 1차 심의)

2014. 4.25 : 안양교 형식변경 공람공고

2014. 6.19 : 남부순환로 자동차전용도로 해제

2014.11. 4 : 건설기술심의

2014.11. 5 : 빛공해심의 위원회 심의

용역비 정산

(단위 : 원)

구 분		계약금액			비 고
		당초	변경	증·감
1.설계비	안양교	343,440,000	338,900,000	(감)4,540,000	기존자료 등 활용율 조정
	광복교	395,500,000	395,500,000	-
2.측량비		15,712,532	15,712,532	-
3.교통분석비		13,105,745	13,105,745	-
4.디자인용역비		11,970,000	11,970,000	-
5.경제성검토		6,886,000	6,886,000	-
6.사전환경성검토		0	0	-
7.지반조사비		37,539,839	37,539,839	-
계		823,940,000	819,394,546	(감)4,545,454
8.부가가치세		82,394,000	81,939,454	(감)454,546
9.도로포장평탄성향상방안 연구		37,500,000	37,500,000	-
10.설계자문비		3,500,000	3,500,000	-
총계		947,334,000	942,334,000	(감)5,000,000

※ 변경(감)사유 : 안양교 설계비 산출기준(실비정액가산방식)에 의거 지반조사자료 및

부대시설 기존자료 추가활용 적용율 증가

- 당초 : 설계비 369,700,000원×7.1% ≒ (감)26,260,000원

- 변경 : 설계비 369,700,000원×8.3% ≒ (감)30,800,000원

30,800,000원-26,260,000원≒(감)4,540,000 (조정 5,000,000원, VAT포함)

향후 추진계획

- 2015. 2.17. 이후 : 설계변경 재계약 및 용역 준공처리. 끝.