문서번호	소방행정과-2122
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장		소방서장
조성종	김제현	김규태		02/16 임선호
협 조

용산소방서
2015년도 청사 보수.보강 사업 기본계획

2015. 2.

용산소방서

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

용산소방서

2015년도 청사 보수.보강 사업 기본계획

2015년도 소방청사 보수,보강공사 사업예산의 조기집행을 통한 경제활성화를 촉진하고 노후된 청사를 보수,보강하여 안전하고 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함.

Ⅰ		관련근거

◈ 市소방행정과-1460(2015.1.20.)호『2015년도 세출예산 재배정 계획알림』

◈ 市소방행정과-1420(2015.1.19.)호『2015년도 세입·세출 예산편성 결과 알림』

Ⅱ		추진방향

◈ 노후 청사시설물 보수,보강을 통한 안전하고 쾌적한 청사환경 조성

◈ 현장대응단 신설에 따른 사무공간 확보 및 직무환경개선

◈ 실외 휴게공간 정비를 통한 직원들의 사기진작에 기여

Ⅲ		사업개요

◈ 주요사업

◦ 현장대응단 사무공간 재배치 및 환경개선공사

◦ 현장대응단 통합사무실 시스템 냉.난방기 설치공사

◦ 별관청사(119사랑의목욕봉사실) 옥상 등 방수 공사

◦ 소방청사 화장실 및 식당 환경개선공사

◦ 본서 후정 캐노피 설치공사

◈ 사업기간 : 2015년 1월. ~ 12월. (상반기중 60% 조기집행예정)

◈ 사업예산 : 금119,762,000원(금일억일천구백칠십육만이천원)

◦ 시설비(401-01)           : 금110,762,000원

◦ 자산및물품취득비(405-01) : 금  9,000,000원

주요 사업명	소요예산(원)	예산과목
	110,762,000
1. 현장대응단 사무공간 재배치 및 환경개선공사	15,820,000	시설비(401-01) 자산및물품취득비(405-01)
2. 현장대응단 통합사무실 시스템 냉.난방기 설치공사	14,000,000	시설비(401-01)
3. 별관청사(119사랑의목욕봉사실) 옥상등 방수 공사	13,899,000	시설비(401-01)
4. 소방청사 화장실(샤워장) 및 식당 환경 개선공사	44,310,000	시설비(401-01)
5. 본서 후정 캐노피 설치공사	22,733,000	시설비(401-01)

◈ 예산과목

◦ 직무환경개선/소방관서 보수,보강공사/시설비(401-01)

◦ 직무환경개선/소방관서 보수,보강공사/자산및물품취득비(405-01)

Ⅳ		세부추진계획

◈ 현장대응단 사무공간 재배치 및 환경개선공사(집행완료)

◦ 위    치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167  1층

◦ 사업기간 : 2015. 1월∼ 2월(현장대응단 1월 업무개시로 사업조기완료)

◦ 사업규모

- 사무공간 재배치 : 1층 현장대응단 사무실(93㎡), 2층 현장대응단장실(31.5㎡)

- 파티션 제작.설치 : 1층 통합사무실 및 민원안내실

- 물품구매.제작 : 사무실 표지판·직원배치도 제작, 사무집기류 구매

◦ 소요예산 : 금15,820,000원(금일천오백팔십이만원)

◦ 계약방법 : 전자수의시담 및 조달조매

◦ 세부일정

월별	세 부 내 용	비고
2014.12월	기본계획 수립
2015. 1월	시장가격조사, 발주계획
1월	계약체결 및 공사 착공
2월	준공, 검사(수), 대가지급

◈ 현장대응단 통합사무실 시스템 냉.난방기 설치공사

◦ 위    치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167  1층

◦ 사업기간 : 2015년 3월 ~ 2015. 6월

◦ 사업규모

- 사무공간(1층) : 실내기(2.5HP,3HP,4HP) 3기 설치

- 주차장입구 : 실외기(10HP) 1기 설치

- 기타공사 : 각종 배관·전기공사, 중앙제어시스템 연계

◦ 소요예산 : 금14,000,000원(금일천사백만원)

◦ 계약방법 : 전자공개수의계약(또는 조달구매)

◦ 세부일정

월별	세 부 내 용	비고
3월	기본계획 수립
3월	시장가격조사, 발주계획
4월	입찰 및 계약체결 및 공사 착공
6월	준공, 검사(수), 대가지급

◈ 별관청사(119사랑의목욕봉사실) 옥상 등 방수공사

◦ 위    치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167  별관

◦ 사업규모 : 바닥면적 181.5㎡ (옥상, 2층테라스)

◦ 사업기간 : 2015년 3월 ~ 2015. 6월

◦ 소요예산 : 금13,899,000원(금일천삼백팔십구만구천원)

◦ 계약방법 : 전자공개수의계약

◦ 공사내용

- 옥상 기존 방수도료 제거

- 우레탄 방수재 도표

◦ 세부일정

월별	세 부 내 용	비고
3월	기본계획 수립
3월	시장가격조사, 발주계획
4월	입찰 및 계약체결 및 공사 착공
6월	준공, 검사(수), 대가지급

◈ 소방청사 화장실(샤워장) 및 식당환경개선 공사

◦ 위    치 : 서울특별시 용산구 이태원로 196  이태원119안전센터 외 3개소

◦ 사업규모 : 각 119안전센터 화장실(샤워장) 및 식당

◦ 사업기간 : 2015년 3월 ~ 2015. 6월

◦ 소요예산 : 금44,310,000원(금사천사백삼십일만원)

◦ 계약방법 : 전자공개수의계약

◦ 공사내용

- 화장실 노후변기 교체 및 바닥방수 타일공사

- 샤워장 순간온수기 설치 및 샤워장 내부타일공사

- 식당 씽크대 교체 및 주방기기 교체 등

◦ 세부일정

월별	세 부 내 용	비고
3월	기본계획 수립
3월	시장가격조사, 발주계획
4월	입찰 및 계약체결 및 공사 착공
6월	준공, 검사(수), 대가지급

◈ 본서 후정 캐노피 설치공사

◦ 위    치 : 서울특별시 용산구 한강대로 167

◦ 사업규모 : 폭4.6m×길이30m×높이4m (면적 130㎡)

◦ 사업기간 : 2015년 3월 ~ 2015. 6월

◦ 소요예산 : 금22,733,000원(금이천이백칠십삼만삼천원)

◦ 계약방법 : 전자공개수의계약

◦ 공사내용

- 골조작업

- 캐노피 렉산시공

◦ 세부일정

월별	세 부 내 용	비고
3월	기본계획 수립
3월	시장가격조사, 발주계획
4월	입찰 및 계약체결 및 공사 착공
6월	준공, 검사(수), 대가지급

Ⅴ		기대효과

◈ 시설물의 내구성 향상으로 청사 유지관리의 효율적 운영

◈ 직원 야외 휴게공간 확보에 따른 근로의욕 향상 및 근무환경 개선

◈ 식당 노후 주방설비 및 집기교체를 통한 급의 질 향상 및 위생관리 개선