문서번호	도로보수과-1657
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
구희옥		김권일	02/16 代이은엽
협조	관리단속과장		이은엽
	주무관		천석기

포장도로 복구공사(연간단가-2구역)

설계변경(정산) 검토보고(제3회)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02

강서도로사업소

(도로보수과)

포장도로 복구공사(연간단가-2구역)

설계변경(정산) 검토 보고

우리사업소에서 시행중인 “2014년 포장도로 복구공사(연간단가)와 관련하여 겨울철 소파대비 및 현장여건 변동으로 인한 물량증감에 따른 설계변경(정산) 내역을 보고드림.

공사 현황

○ 공 사 명 : 2014년 포장도로 복구공사(연간단가 – 2구역)

○ 공사개요 : 절삭 덧씌우기 A=207a 소파 포장복구 14a

○ 공사기간 : ‘14. 4.15. ~ ’15. 2.27

○ 공 사 비 : 1,300백만원(도급비 975백만원, 관급비 291백만원
폐기물처리비 및 이전비 34백만원)

예산 현황

구 분	예 산 액				비고
	계	기배정예산	재배정예산	집행잔액
계	1,300,000,000	750,000,000	300,000,000	250,000,000
긴 급 복 구	1,050,000,000	750,000,000	300,000,000	-
노 후 포 장	250,000,000	-	-	250,000,000

설계변경 현황

○ 설계변경 사유

- 포장도로 복구공사(1구역) 준공검토보고 : 도로보수과-256(2015.1.9.)

· 휴일 대기근무 및 휴일 현장출동 추가(1월3일~2월22일까지)

- 제2회 설계변경 시 제5차 작업지시 노면표시 누락분 추가(L=2,264m)

- 2015년 노후포장도로 정비공사 포장대상구간 코아채취 40공 추가

○ 주요공종 변경 현황

연번	공 종	단위	수량		비 고 (사 유)
			당초	변경
1	긴급 소파보수	일	68.0	19.0	겨울철 기상 양호로 인한 정비 물량 감소 및 현장여건 변동으로 인한 물량증감
2	휴일 대기근무	일	-	19.0
3	휴일 현장출동	시간	-	10.0
4	노면표시	m	-	2,264	제5차 작업지지시 누락분 노면표시 추가
5	코아채취 (Φ10cm, T=20cm)	공	-	40	2015년 포장대상 구간 코아채취
6	퇴직공제부금비	원	7,059,280	3,645,600	실비 정산
	산업안전보건비	원	10,353,690	4,723,000

○ 사업비

구분	계	도급비	관급비	이전비 (폐기물처리비)	비고
당초	1,300,000,000	975,238,000	290,431,000	34,331,000
변경	1,227,994,000	903,232,000	290,431,000	34,431,000
증감	감)72,006,000	감)72,006,000	-	-

○ 사업기간 : 변경없음

○ 예산과목

- 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비

검토의견

○ 상기 설계변경(정산) 내역과 같이 설계변경(정산)을 시행하여 “2014년 포장도로 복구공사(연간단가 – 2구역)” 사업추진에 만전을 기하고자함.

붙임 : 변경내역서 1부. 끝.