보  고  서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	손현정	이경희	02/16 장시명

제 목 : 급수공사 연기 보고

=============================================================

명에 의하여 급수공사 업무 수행 중 아래와 같은 사항이 있어 보고합니다.

▢ 현 황

연번	위 치	공사개요	작업지시 번호	비 고
1	***************	D=15mm *1전 설치	신설-228번

▢ 보고 내용

○ 상기 수전분리 신청건은 기존건물 급수공사 관련 작업지시를 하였으나, 다세대주택

추가 수전분리 요청이 진행중으로 수요가에서 동시해 급수공사 해달라는 요청이 있는 바, 급수공사 연기원을 제출하여 불가피하게 연기하여야할 실정임

▢ 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치 의견

○ 위와 같은 실정으로 아래와 같이 공사기간을 연기하여 급수공사 시행에 만전을 기하고자 합니다.

작업지시 번호	당초 작업기간	변경 작업기간	비 고
신설-228번	’15.02.10 ~ ’15.02.17	’15.02.10 ~ ’15.03.06

붙임 : 상수도공사 연기원 1부.(별도첨부)  끝.