문서번호	설비부-2032
결재일자	2015.2.16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김두환		유병기	02/16 박기형
협 조

- 서울 거리예술센터 조성 전기공사 -

공사기간 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 02.

도시기반시설본부

설 비 부

「서울 거리예술센터 조성 전기공사」

공사기간 연기 검토 보고

본 전기공사의 선행 공정인 건축공사의 공사기간 연기 조치에 따른 공사기간을 다음과 같이 연기 조치하고자 검토 보고 드림.

Ⅰ		공사개요

공 사 명 : 서울 거리예술센터 조성 전기공사

공사위치 : 광진구 광장동 17번지 일대(구의 취수장)

공사규모 : 구의 취수장 서울 거리예술센터 문화공간 조성(전기 및 소방 공사)

공사기간 : 2014.10.13. ∼ 2015.02.28.

계약금액 : 금451,297,000원

시 공 자 : 스마트전력(주) 대표 김재만

Ⅱ		공사기간 연기 검토 내용

관련근거

○ 준공기한 연기 검토의견서 제출 : 자람(감리)-150213호(2015.02.13.)

공사기간 연기사유

○ 본 전기공사의 선행 공정인 건축공사 공사기간 연기(2014.02.28.→2014.03.31.)에 따른 당초 공사기간으로는 잔여 공정(現 공정률 75%) 완료를 위한 절대공기가 부족하여 공사기간 연기조치가 필요함.

공사기간 연기내용

구분	당 초	변 경	비 고
공사기간	2014.10.13.∼2015.02.28	2014.10.13.∼2015.03.31	(증31일) 계약금액 변경없음

귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

지체상금부과여부 : 미부과

Ⅲ		보고자 조치의견

본 전기공사의 당초 준공기한을 2015.03.31.일까지 연기조치하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 기술검토의견서(책임감리원) 1부. 끝.