문서번호	원무과-2477
결재일자	2015.2.16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	원무과장
김경종	조선행	02/16 김종환

서북병원 음압유지시설 설치공사

폐기물처리용역 예산집행 계획

2015. 2.

서울특별시 서북병원

(원 무 과)

서북병원 음압유지시설 설치공사

폐기물처리용역 예산집행 계획

『서북병원 음압유지시설 설치공사 폐기물처리 용역』설계변경증액금액에 대한 예산집행 계획을 보고 드림

※ ‘15.1월에 설계변경(정산)이 시행되어 ’14년도 예산 지출원인행위 불가

용역개요

❍ 용 역 명 : 서북병원 음압유지시설 설치공사 폐기물처리 용역

❍ 용역기간 : 2014. 10. 21. ~ 2015. 2. 16.

❍ 계약금액 : 7,800,000원

❍ 계 약 자 : 서울환경 ********

❍ 용역내용 : 폐콘크리트(83톤) 및 혼합폐기물(28톤) 처리 등

설계변경 사항

❍ 관련근거 : 시설관리공단 공사감독1처-1324(2015. 2.9.)

❍ 설계변경 : 폐기물 변경(폐콘리트 → 혼합폐기물)에 따른 증액

구 분	당 초	변 경	증 감
총 용역비	7,800,000원	10,974,000원	증	3,174,000원

❍ 물량변경

공 종		당 초	변 경	증 감
운 반	건설폐기물	98.54㎥	120㎥	증	21.43㎥
처 리	폐콘크리트	83톤	-	감	83톤
	혼합폐기물	28톤	90.86톤	증	62.86톤

예산집행 계획

❍ 당초금액(7,800천원) : ‘14년도 예산 집행(청사시설 운영관리, 시설비)

❍ 증액금액(3,174천원) : ‘15년도 예산 집행(청사시설 운영관리, 공공운영비)

❍ 집행사유

- ‘15. 1월에 폐기물 정산에 따른 설계변경이 시행되어 ’14년도 예산 집행원인행위가 불가능 하므로

- 증액금액은 ‘15년도 예산으로 집행 처리

행정사항

❍ 본 예산집행 계획을 감독기관 시설관리공단에 통보하여

- 당초 계약금액 7,800천원으로 준공처리토록 하고

❍ 증액금액은 ‘15년도 예산으로 집행

붙임 : 시설관리공단 공문 각 1부.  끝.