투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	설계변경(총차2회, 2차1회) 계약의뢰(송정사근빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역)

1. 우리부에서 시행중인 「송정사근빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역」의 설계변경 계약을 아래와 같이 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다

가. 용 역 명 : 송정사근빗물펌프장 증설공사 건설폐기물 처리용역

나. 도급금액 : 196,370,900원(2차 : 58,301,570원)

다. 용역기간 : 총차 2013.3.15 ~ 2015. 2.28.(2차:2014.7.1.~2015.2.28.)

라. 계 약 자 : ㈜ 벽성그린산업 대표 황윤남외1

마. 설계변경내역

1) 총차 2회(공사기간 : 2013.3.15 ~ 2015. 2.28. 변경없음.)

구 분		용역비(단위 : 원)			비고
		당초	변경	증.(감)
총 용 역 비		196,370,900	196,200,400	감)170,500
용역비	공급가액	178,519,000	178,364,000	감)155,000
	부가세	17,851,900	17,836,400	감)15,500
	계	196,370,900	196,200,400	감)170,500

2) 2차 1회(공사기간 : 2014.7.1.~2015. 2.28. 변경없음.)

구 분		용역비(단위 : 원)			비고
		당초	변경	증.(감)
총 용 역 비		58,301,570	58,131,070	감)170,500
용역비	공급가액	53,001,427	52,846,427	감)155,000
	부가세	5,300,143	5,284,643	감)15,500
	계	58,301,570	58,131,070	감)170,500

바. 예산과목

1) 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책, 송정빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

2) 도시안전실 하천관리과, 치수 및 하천관리, 수방대책, 사근빗물펌프장 시설용량 증대, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 검토보고서 1부.

2) 설계변경내역 (총차2회, 2차 1회) 내역서 각 1부.

3) 합의각서. 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	조양연		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	02/16 임춘근
협조자	계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-2070	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 빌딩 12층	/
전화	0237082557	/전송	0237082599	/	choaral@seoul.go.kr	/	대시민공개