투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	면목천 복개말단부 악취저감시설 설치공사 설계변경시행

우리센터에서 시행중인「면목천 복개말단부 악취저감시설 설치공사」에   대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 합니다.

가. 공사명 : 면목천 복개말단부 악취저감시설 설치공사

나. 도급자 : (주)파란산업개발  대표  박판성

다. 공사기간 : 2014. 12. 30 ~ 2015. 2. 20.

라. 변경내역

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증 ․ 감
총공사비		211,110,480	197,120,000	감)13,990,480
도급비	공급가액	191,918,619	179,200,000	감)12,718,619
	부가가치세	19,191,861	17,920,000	감)1,271,861
	계	211,110,480	197,120,000	감)13,990,480

마. 변경사유 : 물량증감 및 보험료, 이설비 등 정산

바. 예산과목 : 도시안전실 물재생시설과,물재생시설개선 및 관리,친환경재생       시설개선,물재새시설개선,복개하천주변악취방지공사,시설비

붙 임 :  설계변경 내역서 및 보고서 각1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	김근수		물재생과장	강병수		중랑물재생센터소장	02/17 김동기
협조자	주무관	최승룡
시행	물재생과-1075	(		)	접수		(		)
우	133-837	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동, 중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2574	/전송	02-2211-2579	/	kksu49@seoul.go.kr	/	대시민공개