투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	2014년 도로시설물 일상유지보수공사 설계변경 시행

1. 우리 사업소에서 시행중인 『2014년 도로시설물 일상유지보수공사』에 대한 설계 변경을 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 설계변경 내역

○ 공 사 명 : 2014년 도로시설물 일상유지보수공사

○ 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

○ 계약상대자 : ㈜일송테크 대표 김운호

○ 변경사유 : 공종별 물량 증·감 및 신규 공종 발생에 따른 변경

○ 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증․감
총공사비	1,545,433,000	1,545,433,000	-
도 급 비	1,375,302,300	1,375,302,300	-
관 급 비	167,125,700	167,125,700	-
이 전 비	3,005,000	3,005,000	-

○ 예산과목

- 교량관리, 교량시설물운영, 도로시설(교량관리)일상유지보수, 시설비

- 도로시설관리, 터널시설관리, 도로시설물(터널, 복개, 지하차도)일상유지보수, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 검토 보고서 1부.

2) 변경 내역서 1부.  끝.

주무관	홍정식		시설보수과장	정재현		북부도로사업소장	02/17 이승진
협조자	계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-1375	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울특별시 강북구 한천로 913	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5451	/전송	944-5459	/		/	대시민공개