문서번호	시설과-1196
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	시설과장
김영수	한종수	02/17 이종한

『남산공원(팔각광장) 상수도관 누수복구공사』관련

설계변경 시행보고

2015. 02

시   설   과

『남산공원(팔각광장) 상수도관 누수복구공사』

설계변경  시행보고

『남사공원(팔각광장) 상수도관 누수복구공사』와 관련하여 누수복구공사 시공중 현장여건에 따른 설계변경 사항이 발생하여 설계변경에 반영하고자 보고드림

1		공사개요

공 사 명 : 남산공원(팔각광장) 상수도관 누수복구공사

공사개요 : 상수도관 누수복구(D=50mm) 1식

공사기간 : 2015.02.09 ~ 2015.02.18

공사금액 : 14,490,000원

도 급 자 : 삼조건설(주)   대 표 : 정 은 영

2		설계변경 내용

상수도관로 누수로 인한 배관탐지 및 지하매설물 확인에 따른 횡단굴착으로 토공량 증가 : 51㎥→96㎥

상수도 관로조사 및 누수지점 탐지로 누수복구시 상수도관로의 부설연장 감소 : 37m→13m

배관탐지로(횡단굴착) 인한 아스팔트 포장공종 발생 13㎡

기타 현장여건에 따른 부대공종 변경 발생등

3		처리의견

상수도관 배관탐지 및 지하매설물 확인에 따른 토공량(96㎥) 및 아스팔트포장 물량(13㎡) 설계변경 시행

상수도관 부설연장 감소(37m→13m)에 따른 설계변경 시행

기타 부대공등 일부공종 변경사항 설계변경 시행

소요예산 : 1,300천원(증)

4		행정사항

상수도 누수복구 공종의 특성상 현장조사가 불가능하며, 현장여건에 따라 발생된 변경사항에 대하여『처리의견』과 같이 설계변경에 반영하고자 함

설계변경에 소요되는 예산은 남산및산하공원 시설보수정비, 시설비(401-01)를 활용하여 변경시행.

붙 임  1. 현황사진 1부.

2. 변경설계서 1부. 끝.