투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	변경계약의뢰-2014년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사

1. 시설보수과-1416(2015.2.17.)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『2014년 도로시설물(교량) 일상유지 보수공사』에 대한 설계변경(정산) 계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 도로시설물(교량) 일상유지보수공사

나. 공사기간 : 2014. 4. 17 ~ 2015. 2. 28.

다. 도 급 자 : 금보건설  대표 이인희

라. 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	1,640,382,500	1,577,910,000	감)	62,472,500
도 급 비	1,490,822,500	1,462,600,000	감)	28,222,500
관 급 비	112,060,000	92,510,000	감)	19,550,000
이 전 비	37,500,000	22,800,000	감)	14,700,000

마. 사업별 예산과목

사 업 명	세부 예산과목	예산현황
도로시설물일상유지보수공사	도로시설과, 교량관리, 교량시설물운영, 도로시설물(교량)일상유지보수, 시설비	\1,324,500천원
서울역고가 보수공사	도로시설과, 교량관리, 고가차도 및 입체교차로 관리, 서울역고가 보수공사, 시설비	\ 307,000천원

바. 설계변경 사유

- 시설물 일상유지관리 작업에 따른 시공물량 증·감 등

붙임 : 1. 설계변경 시행문 1부.

2. 검토보고서 및 변경내역서 1부.

3. 제비율검증서 1부.

4. 합의각서 1부.  끝.

								서울특별시 서부도로사업소장
주무관							이동섭				주무관					김지환					시설보수과장					02/17 신동헌
협조자
시행			시설보수과-1443										(						)		접수												(						)
우	121-270					서울 마포구 상암동 1732																/
전화		02-300-8375							/전송			02-300-8384					/	lds0420@seoul.go.kr													/	부분공개(5)