문서번호	시설과-441
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	시설팀장	시설과장		동부공원녹지사업소장
김영균	임록화	진병규		02/17 이춘희
협 조	공원운영과장		서동선
	주무관		代지정희

『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선시설 신축』

설계용역 시행계획

2015. 2.

동부공원녹지사업소

시  설  과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	설계공모심사	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 ■	(	지방계약법,건설기술진흥법등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 ■ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	도시공간개선단 등 (서울특별시)	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『보라매공원 현장근로자 근로환경 개선시설 신축』

설계용역 시행계획

보라매공원 현장근로자 근로환경 개선시설(대기▪휴게실)을 신축하여 안전사고 예방 및 공원경관 개선은 물론, 근로환경 개선을 통한 현장근로자의 복지증진과 작업능률 향상을 도모코자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

보라매공원 현장근로자 환경개선사업 추진계획(공원운영과-224, ‘15.1.7)

서울시 공공건축물 설계발주기준 시행(건축기획과-12322, ‘13.6.26)

건축 설계공모 운영지침(국토교통부 고시 제2014-345,‘14.6.12)

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조

(수의계약에 의할 수 있는 경우)

Ⅱ		사 업 개 요

사업위치 : 보라매공원내

사업기간 : 2015. 02. ~ 2015. 09.

사 업 비 : 60백만원(설계비 54백만원, 설계공모보상비 6백만원)

▸ 동부공원녹지사업소 공원운영과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화 지원, 공원녹지 수준향상, 공원관리 및 도시녹화 지원, 보라매공원 시설물 정비, 시설비

사업내용 : 기본 및 실시설계용역

▸ 대지면적 : 415,141㎡(부지면적 300㎡)

▸ 규    모 : 지하 0층, 지상 2층, 연면적 약 420㎡

▸ 용    도 : 남▪녀 대기(휴게실) 및 창고

Ⅲ		추진현황

2015. 01. 07 : 사업추진계획 수립(공원운영과)

2015. 02. 10 : 기술용역타당성심사(기술심사담당관-적정)

Ⅲ		발주계획

발주방법 : 지명(초청)설계공모(설계용역비 3억 미만)

▸「서울형 공공건축가」운영계획(건축기획과-118323,‘11.11.28)

시행방법 : 서울시 도시공간개선단에서 추천한 공공건축가(5명)를 상대로 설계공모

추진절차

공공건축가 추천 (서울시도시 공간개선단) 지명설계경기 공고 (홈페이지)		응모접수 및 설계작업		작품접수		작품심사 (심사위원회) 당선작선정 시상 및 계약		설계용역 수행

▸ 당선작 선정을 위한 심사위원회 구성과 시상은 별도방침 수립시행

Ⅳ		세부추진계획

2015. 02. ~ 04 :  공공건축가 추천의뢰,설계공모,계약

▸ 2015.03.       설계공모 입찰공고(14일이상) 및 심사방침 결정

▸ 2015.04.       심사위원회 개최 및 용역계약

2015. 04. ~ 10 :  용역시행

▸ 2015.05.~08  기본설계▪도시공원심의▪공원조성계획변경

▸ 2015.09.~10  실시설계▪공용건축물 협의(동작구청 건축과)

2015. 10.        :  설계용역 준공

Ⅴ		행정사항

2015.02월중 서울시 도시공간개선단에「공공건축가」추천의뢰

붙임 1. 보라매공원 현장근로자 근로환경 개선사업 추진계획 1부.

2. 설계비 산출서 1부.

3. 과업내용서 1부.

4. 기술용역타당성심사결과 1부. 끝.