문서번호	시설보수과-1378
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김승진		02/17 박병연
협 조
	주무관			유태용
	주무관			류춘광
	주무관			김규춘
	주무관			조정갑

‘14년 관내 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고

(9~10차)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

관내 도로시설물 일상유지보수공사 작업완료 보고(9~10차)

관내 도로시설물 손상에 대하여 작업지시한 내역에 대한 작업완료 결과를 보고 드림

1. 공사현황

가. 공 사 명 : 2014년 관내 도로시설물 일상유지보수공사(긴급)-강서

나. 공사기간 : 2014. 4. 8 ~ 2015. 2. 28

다. 도 급 비 : 1,555,921,000원

라. 공사개요

신축이음교체 323m, 균열보수 327m, 단면보수 175㎡, 표면처리 등

마. 시 공 사 : 종정종합건설(주) 대표 방은혜

2. 보고내용

가. 작업지시 및 완료

- 9차 작업지시『근거:시설보수과-9324(2014.11.20)』

․ 작업기간 : 2014. 11. 20 ~ 1. 20

․ 작업완료 : 2015.  1. 20

- 10차 작업지시『근거:시설보수과-105(2015.1.6)』

․ 작업기간 : 2015  1.  7 ~  2. 10

․ 작업완료 : 2015.  1. 30

나. 작업지시 및 완료내용

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
9차	1	화곡고가차도	포장부 망상균열 (신월동측 토공부)	절삭후아스팔트덧씌우기	498㎥	절삭후아스팔트덧씌우기	498㎥
	2	오목지하차도	포장부 망상균열 (목동방향 박스내부)	절삭후아스팔트덧씌우기	21.28a	절삭후아스팔트덧씌우기	21.28a
	3	행주2교	포장부 망상균열 (행주대교방향)	소규모긴급도로복구	6㎡	소규모긴급도로복구	3㎡
	4	가리봉철도고가	죠인트부 균열발생 (보도와 육교 이음부)	실란트 충진 및 신축이음덮개 설치	4개소	실란트 충진 및 신축이음덮개 설치	1개소
	5	영등포R 고가차도	콘크리트 균열발생 (P7,코핑부하면)	콘크리트 균열보수	2m	콘크리트 균열보수	2m
			콘크리트 백태,들뜸 (A1측,G1~2,G7~8,P2,P3,P5,P6)	콘크리트 표면보수	166㎡	콘크리트 표면보수	134.8㎡
			콘크리트 박리박락 (A1측G3하면)	콘크리트 단면보수 (t=20mm)	0.2㎡	콘크리트 단면보수 (t=20mm)	0.2㎡
			배수홈통 파손 (P2,P3,P5,P6)	강관배관	104	강관배관	104
				곡관배관	16	곡관배관	56
				레듀샤	16	레듀샤	24
			빗금무늬고무재파손 (교각P3,P4,P5,P6)	일일노무(고무재제거)	1회	일일노무(고무재제거)	1회
				빗금도색(콘크리트면)	62.8㎡	빗금도색(콘크리트면)	62.8㎡
	6	화곡터널	콘크리트균열발생 (터널내부라이닝구간)	콘크리트균열보수	34.8m	콘크리트균열보수	34.8m
			조인트부이격 (터널내부라이닝구간)	조인트이격부보수 (수밀코킹)	45m	조인트이격부보수 (수밀코킹)	45m
	7	오금교	콘크리트누수균열발생 (A1,P5측바닥판하면)	콘크리트균열보수	12m	콘크리트균열보수	14m
			콘크리트파손,철근노출 (A1측바닥판하면)	콘크리트단면보수 (T=30㎜)	2.5㎡	콘크리트단면보수 (T=30㎜)	5.38㎡
			강구조물도장부식 (강박스내부등)	강재재도장	109.5㎡	강재재도장	139.8㎡
			콘크리트잔재물퇴적 (강박스내부P5측)	일일노무 (잔재물청소)	1회	일일노무 (잔재물청소)	1회
			강재횡리브틈새누수 (목동방향박스내부)	일일노무 (틈새실리콘실링)	1회	일일노무 (틈새실리콘실링)	1회
			배수홈통고정불량 (A1측강박스외부)	일일노무 (배수홈통 고정)	1회	일일노무 (배수홈통 고정)	1회
	8	등촌지하차도	유도배수로길이부족 (오금교방향박스내부)	유도배수로설치	6m	유도배수로설치	1.5m
	9	개봉고가차도	높이제한표지판 (개봉동측고가옆)	빗금무늬고무판설치	6EA	빗금무늬고무판설치	5EA
	10	국회앞지하차도	지하차도환기구 (구여의도공원내환기구)	위험안내표지판설치	2개소	위험안내표지판설치	2개소
	11	신도림지하차도	지하보도입구반사경부재 (3,4번출입구입구)	도로반사경설치 (Φ600㎜,앙카식)	2개소	도로반사경설치 (Φ600㎜,앙카식)	2개소
	12	고척2지하차도	경계석(화강석)이탈 (지하차도상부U턴구간)	일일노무	1회	일일노무	1회
	13	행주1교	콘크리트파손 (S2하면배수구주변)	상태양호, 주의관찰	1회	상태양호, 주의관찰	1회
			배수관접합불량 (A1우측배수관)	일일노무	1회	일일노무	1회
	14	도림천좌안 복개구조물	배수관탈락 (교각P240측하부)	일일노무	1회	일일노무	1회
	15	역곡천교 (추가)	교량하부화재흔적 (교대A2측하부)	U형플륨관설치	30m	U형플륨관설치	30m
				메쉬휀스설치	30경간	메쉬휀스설치	19.5경간
				메쉬출입문설치		메쉬출입문설치	1개소

작업 차수	연번	시설물명	위치	작업내역	수량	완료내역	수량	비고
10차	1	구로고가차도	철판보강부파손 (P3교각코핑부)	철판접착보강공	1.5㎡	철판접착보강공	2.0㎡
	2	개화IC교	유도배수로파손 (양방향박스내부)	유도배수로설치	15m	유도배수로설치	15m
	3	서울교접속 지하차도	유도배수로파손 (박스내부천정)	유도배수로설치	15m	유도배수로설치	15m
	4	양평교	충돌주의표지판파손 (P2~P3하부)	빗금무늬 고무판설치	16EA	빗금무늬 고무판설치	14EA
	5	구로1교	콘크리트백태발생 (A1,A2측하면거더부)	그라인딩	100㎡	그라인딩	118㎡
			종조인트하부누수발생 (A1,A2측종조인트하부)	유도배수로설치	26m	유도배수로설치	26m
			배수홈통망실 (구로방향대림동측하부)	강관배관	5m	상태양호로 작업취소
				곡관배관	1EA
				레듀샤	1EA
	6	가리봉철도 고가차도	방호벽이탈및개소부족 (신림동방향고가상부)	콘크리트방호벽 정비및설치	6EA	콘크리트방호벽 정비및설치	3EA
	7	개봉고가차도	교량용난간탈락 (개봉동측시점부)	일일노무 (교량용난간정비)	1회	일일노무 (교량용난간정비)	1회
	8	도림천좌안 복개구조물	배수홈통탈락 (교각P160부근)	일일노무 (배수홈통정비)	1회	일일노무 (배수홈통정비)	1회
			종조인트하부이물질낙하 (교각P120부근)	일일노무 (이물질제거)	1회	일일노무 (이물질제거)	1회
	9	관내 도로시설물	시설물관리명판 정비	시설물관리명판정비 (스텐레스판부착)		시설물관리명판정비 (스텐레스판부착)	24개소	추가
				시설물관리명판정비 (반사지부착)	100개소	시설물관리명판정비 (반사지부착)	100개소

다. 개략공사비 : 137,664천원(세부내역 별첨)

3. 검토의견

- 작업지시내용과 같이 이상없음 작업완료하여 추후 설계변경시 반영

하고자 함

별첨 : 1) 시공사 작업완료보고서 1부(종이문서)

2) 작업완료 보수사진 1부(종이문서). 끝.