투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	준공기한 연기 요청(고척교 확장 전기공사)

우리 본부에서 시행하고 있는 『고척교 확장 전기공사』 준공기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 고척교 확장 전기공사

나. 계 약 자 : 건민전기㈜ 대표 이강민

다. 계약금액 : 금373,274,320원

라. 준공기한 연기내용

구 분	당 초	변 경	비 고
준공기한	2013.12.06 ~ 2015.02.28	2013.12.06 ~ 2015.06.30

마. 연기사유 : 선행공정(토목) 지연에 따른 후속공정 연기

바. 계약금액 : 변동없음

사. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 준공기한 연기 검토보고서 및 합의서 1부.  끝.

	설비부장
주무관	배수웅		건축설비과장	김영수		설비부장	02/17 박기형
협조자
시행	설비부-2127	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동 31) 서소문별관 2동 2층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8626	/전송	02-3708-8659	/	swoong@seoul.go.kr	/	대시민공개