투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	내부결재
(경유)
제 목	(감액)변경계약 체결 보고-면목천 복개 말단부 악취저감시설 설치 공사

물재생과-1075(2015.02.17)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약 체결하였음을 보고합니다.

가. 계약건명 : 면목천 복개 말단부 악취저감시설 설치 공사

나. 계약금액 : 감 금13,990,480원(금일천삼백구십구만사백팔십원)

- 변 경 : 금179,200,000원(금일억칠천구백이십만원)

- 당 초 : 금197,120,000원(금일억구천칠백일십이만원)

다.  변경사유 : 물량증감, 보험료 및 이설비 등 정산

라. 계 약 일 : 2014년  12월  23일 (변경계약일 : 2015년 02월 17일)

마. 착 공 일 : 2014년  12월  30일

바. 준공기한 : 2015년  02월  20일

사. 계약업체 : (주)파란산업개발 (대표 백판성)

(☎ 02-564-3547)

붙임  1. 변경계약서 1부.

2. 변경내역서 1부.  끝.

주무관	정은경		관리과장	代유화열		중랑물재생센터소장	02/17 김동기
협조자
시행	관리과-2158	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울 성동구 자동차시장3길 64(용답동,중랑물재생센터)	/	http://env.seoul.go.kr/water
전화	02-2211-2522	/전송	02-2211-2529	/	pandw1@seoul.go.kr	/	부분공개