문서번호	급수운영과-3905
결재일자	2015.2.17.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		소장
최호림	김태형	최명익		02/17 이재덕
협 조

교통소통대책수립 용역 추진계획

(동일로 송배수관정비공사 외 3건)

2015.02.

동부수도사업소

급수운영과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

동일로 송배수관정비공사 외 3건

교통소통대책수립 용역 추진계획

우리사업소에서 시행예정인 『동일로 송배수관정비공사』외 3건의공사에 대하여 교통소통대책수립 용역을 추진하여 도로점용으로 인한 시민불편을 최소화 하고자 함.

용역개요

용역명 : 동일로 송배수관정비공사 외 3건 교통소통대책수립 용역

공 사 명	위 치	구경(mm)	연장(m)	비고
소 계	4건	300~ 1,000	2,260
동일로 송배수관정비공사	중곡동181-23~238-6	1,000	670	1구간
	중곡동612-7~612-6	1,000	30	2구간
아차산로 배수관부설공사	광장동580~337-2	500	460
자양동796번지 외 2개소 배급수관정비공사	화양동526-34~ 자양동779-6	300	840
고산자교 주변 노후송배수관 정비공사(청계천 횡단)	마장동523-4~ 용신동34-7	900	260	도로점용 55m

용역대상 공사현황

용 역 비 : 22,467천원

용역기간 : 착공일로부터 40일간

용역개요 : 상수도관 매설을 위한 이동식 도로점용 2,055m

예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 송배수관)

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후 배급수관)

추진계획

추진절차

- 용역추진계획 방침 → 기술용역 타당성 심사요청(본청 기술심사담당관) → 용역발주 →  입찰공고 및 계약 → 용역수행 및 성과품작성 → 교통소통대책 심의회 보고 → 승인통보 → 공사착공

용역내용

용역목적 : 송배수관 및 배급수관 정비공사에 따른 점용되는 도로의 교통소통대책을 수립하여 교통의 질적 향상을 도모하고, 시민불편을 최소화 하고자 함.

추진근거 : 서울특별시 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제3조 적용대상 3호

과업범위 : 동일로 및 아차산로, 고산자로상 상수도관 부설을 위한 이동식 도로점용

- 동일로 700m, 아차산로 1,300m, 고산자로 55m (L=2,055m)

과업내용

- 교통소통대책 계획 요약서

- 사업지 주변 교통시설 설치계획 및 교통관련 계획

- 교통현황 및 분석

- 공사로 인한 교통영향 분석

산출근거

- 실비정액가산방식 : 교통관련계획 표준품셈에 의해 산출된 투입인원에 대하여

적정인원으로 투입비율 조정산출

향후계획

본청 기술심사담당관에 교통소통대책수립용역 타당성 심사요청 후 심사결과에 따라 용역 발주 시행 후 용역착수

첨부 : 1. 기술용역타당성 심사 요청서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 과업지시서 1부. 끝.