투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(최종)- 2014년 도로시설물보수공사 폐기물처리용역(강서)

우리 사업소에서 시행중인 도로시설물 보수공사와 관련『2014년 도로시설물보수공사 폐기물 처리용역』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)

시행코자 합니다.

가. 용 역 명 : 2014년 도로시설물 보수공사 폐기물 처리용역

나. 용역개요 : 폐기물운반(4,773톤), 폐기물처리(764톤)

다. 용역기간 : 2014. 5. 14 ~ 2015. 2.28

라. 계약금액 : 45,005,500원(일금사천오백만오천오백원정)

마. 도 급 자 : ㈜ 방태 대표 김용남

바. 변경내역

(단위:원)

구 분		당 초	변 경	증․감		비 고
총용역비		45,005,500	43,368,000	감	1,637,500
도급비	순용역비	40,914,091	39,425,455	감	1,488,636
	부가가치세	4,091,409	3,942,545	감	148,864
	계	45,005,500	43,368,000	감	1,637,500

사. 예산과목

- 도로시설과, 고가차도및 입체교차로관리, 개봉고가보수공사,시설비

- 도로시설과, 일반교량관리,여의2교보수공사,시설비 및 부대비,시설비

- 도로시설과, 고가차도및 입체교차로관리, 가리봉철도고가 보수공사,                 시설비 및 부대비, 시설비

- 도로시설과,일반교량관리, 양화교보수공사, 시설비및부대비, 시설비

- 도로시설과, 터널 및 복개관리, 화곡터널보수공사,시설비 및 부대비,                  시설비

- 도로시설과, 터널 및 복개관리, 공항입구지하차도공사, 시설비 및

부대비, 시설비

- 도로시설과, 도로시설물(교량)일상유지보수공사, 시설비 및 부대비,

시설비

첨부 : 1. 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝

주무관	김승진		시설보수과장	박병연		강서도로사업소장	02/17 代이은엽
협조자	주무관	윤신식		계약1팀장	김점선
시행	시설보수과-1343	(		)	접수		(		)
우	100-744	서울시 강서구 양천로 237	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7975	/전송	02-2657-7970	/	ktmksj@seoul.go.kr	/	대시민공개