투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시난지물재생센터
수신자	물재생과장
(경유)
제 목	변경계약체결 통보(통합반류수유량계 바이패스관 및 유량계실 정비공사)

물재생-563(2015.02.16)호와 관련하여 아래와 같이 변경계약이 체결되었음을 통보합니다.

가. 계약건명 : 통합반류수유량계 바이패스관 및 유량계실 정비공사

나. 계약업체 : 에이치지산업개발㈜

다. 변경내역 : 계약금액

- 당초계약금액 : 25,847,760원

- 변경계약금액 : 15,308,000원(감10,539,768원)

라. 변경사유 : 통합반류수유량계 바이패스관 및 유량계실정비공사의 경우 유량계실이 토압을 견디기 힘든 구조로 설계되어 유량계실 정비부분은 안전한 공사를 위해 시설물유지업 등록업체인 센터 시설물 유지보수도급자로 하여금 진행하고자 함.

마. 변경 계약일 : 2015.02.16.

붙임   1. 변경계약서 1부.

2. 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시난지물재생센터소장
주무관	지두연		관리과장	이재성		난지물재생센터소장	02/17 가길현
협조자
시행	관리과-1638	(		)	접수		(		)
우	412-190	경기도 고양시 덕양구 대덕로 426(현천동) 난지물재생센터 관리과	/
전화	02)300-8520	/전송	02)300-8518	/	nanji71@seoul.go.kr	/	부분공개(7)