문서번호	방재시설부-2192
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수시설과장	방재시설부장
이성하		김흥근	전결 02/17 代이도헌
협 조

- 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

준공기한 연기 및 설계변경(총차7회, 2차4회) 검토보고

2015. 2

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사 -

준공기한 연기 및 설계변경(총차7회, 2차4회) 검토보고

현재 시행중인「합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사」와 관련, 준공 후 빗물펌프장 유지관리 기관인 마포구청 추가 요구사항 반영으로 준공기한 연기 및 공종별 수량증·감 발생에 따른 설계변경 사항 검토보고임

□ 관련문서

□ 서울특별시시설관리공단 공사감독1처-1523호(2015.2.13) : 설계변경(총차7회,  2차4회) 및 공기연장 검토보고서 제출

□ 공사개요

□ 공 사 명 : 합정 외 1개소 빗물펌프장 증설공사

□ 공사위치 : 마포구 합정동 196-4, 마포구 성산동 99-5 일원

□ 공사규모 : 빗물펌프장 증설 2개소(합정펌프장, 중동펌프장)

□ 공사기간 : 2013. 1. 4 ~ 2016. 4. 30

□ 도 급 비 : 5,093,587천원

□ 시공사/감리사 : (주)금강주택 / 서울시설관리공단

□ 시설관리공단 보고사항

1. 준공기한 연기

□ 연기내역

구분	당 초	변 경	비 고
총차	2013.01.04 ~ 2016.04.30	2013.01.04 ~ 2016.04.30	변경없음
2차	2013.12.27 ~ 2015.02.20	2013.12.27 ~ 2015.05.31	101일 연기

□ 연기사유

- 선행공사(기계설비) 지연에 따른 미시공 부분 작업일수 반영

- 준공 후 빗물펌프장 유지관리 기관인 마포구청(치수과) 추가 요구사항 공종  공사기간 반영

□ 검토의견

- 준공기한 연기 적정성 여부 : 적정

- 지체상금 부과 여부 : 미부과

2. 설계변경(총차 7회, 2차 4회)

□ 주요 설계변경 내용

연번	주요 변경내용	증·감내역	비고
1	외부담장 물량변경(공사감독1처-966호)	(증)2,189,000	토목
2	합류박스 CCTV조사 및 물돌리기(공사감독1처-1290호)	(증)5,434,000	“
3	중동빗물펌프장 정화조 설치(공사감독1처-726호)	(증)5,863,000	“
4	홍제천변 유용정원석 설치(공사감독1처-886호)	(증)4,378,000	“
5	지배수펌프 배관설치(공사감독1처-1291호)	(증)1,859,000	“
6	쉬트파일 물량조정	(감)141,848,000	“
7	조경식재 물량조정(공사감독3처-206호)	(증)12,496,000	조경
8	기존관사 구조보강(공사감독1처-727호)	(증)12,100,000	건축
9	기존관사 정밀점검 용역시행(공사감독1처-12722호)	(증)9,757,000	“
10	티타늄 아연판 물량조정(공사감독1처-12805호)	(증)48,400,000	“
11	옥상 코핑 물량조정(공사감독1처-12646호)	(증)5,170,000	“
12	기존관사 내부단열(공사감독1처-733호)	(증)3,740,000	“

□ 변경 사유 및 근거

- 공종별 수량 증·감에 따른 내역변경

□  공사비 증,감 현황

(단위 : 천원)

구분		당초	변경	증 감	비고
도급비	총차	5,093,587	5,093,587	-	공종내역변경
	2차	1,322,700	1,322,700	-	“

□ 조치의견

□ 서울시설관리공단 검토보고 의견과 같이 준공기한 연기 및 설계변경(총차7회, 2차4회) 사항이 타당한 것으로 검토되어 승인코자 하며, 계약부서에 변경계약 의뢰하여 사업추진에 만전을 기하고함.

붙임 : 관련 문서.    끝.