문서번호	도로보수과-1554
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		도로보수과장
권세봉		02/17 이규철
협 조
	주무관		이상하

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제13차 )

2015.  2. 16(월)

서부도로사업소

(도로보수과)

2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사

작업지시 완료 보고(제13차)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2014년 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2014. 03. 27 ~ 2015. 02. 28

○ 시 공 사 : 아람건설(주) 대표 김익신

○ 도 급 비 : 470,872,370원

□ 작업완료 보고

○ 건  명 : 교통안전시설(노면표시) 유지보수공사 작업지시(제13차)

○ 작업위치 : 중구 을지로 외환은행 앞 등 42개소(굴착복구 구간)

○ 작업기간 : 2014. 12. 16. ~ 2015. 1. 31.

○ 작업내역

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
1	을지로(중구 을지로58,외환은행 앞)	77m	77m	-
2	퇴계로(중구 광희사거리~한양공고)	52m	0m	감) 52m	기 작업되어 있음
3	독서당로(용산구 독서당로 102)	66m	63m	감) 3m	시공물량 차이
4	을지로(중구 을지로2가 교차로)	319m	319m	-
5	삼일대로(중구 춤무로2가 53-10)	232m	232m	-
6	한남대로(용산구 한남오거리 정류장)	212m	98m	감) 114m	포장구간 축소로 인한 물량변동
7	마포대로(마포구 마포대교 북단)	220m	357m	증) 137m	포장구간 증가로 인한 물량변동
8	이태원로(한강진역 2번출구)	624m	624m	-

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
9	서강로(마포구 광흥창역 사거리)	791m	791m	-
10	독서당로(용산구 한남역 주변)	699m	699m	-
11	충정로(서대문구 충정로역 주변)	1,231m	1,231m	-
12	성암로(마포구 상암동1582-1~1586)	872m	718m	감) 154m	시공물량 차이
13	한강대로(용산구 이촌동 303-8, 노들섬)	506m	191m	감) 315m	포장구간 축소로 인한 물량변동
14	다산로(중구 신당동 370-24)	287m	123m	감) 164m	포장구간 축소로 인한 물량변동
15	녹사평대로(용산구 이태원동 2호터널)	655m	632m	감) 23m	시공물량 차이
16	월드컵로~매봉산로(마포구 상암동1649)	1,521m	1,227m	감) 294m	시공물량 차이
17	매봉산로(마포구 월드컵로1731일대)	2,378m	2,283m	감) 95m	시공물량 차이
18	월드컵북로 (마포구 월드컵북로 13 ~68)	1,923m	1,738m	감) 185m	시공물량 차이
19	양화로 (마포구 합정동 월드컵로1길3)	609m	1,245m	증) 636m	포장구간 증가로 인한 물량변동
20	양화로 (마포구 합정동 414-5)	510m	390m	감) 150m	포장구간 축소로 인한 물량변동
21	월드컵로 (마포구 합정로터리 주변)	285m	43m	감) 242m	포장구간 축소로 인한 물량변동
22	통일로 (은평구 불광동 연신내역주변)	400m	497m	증) 97m	시공물량 차이
23	응암로 (서대문구 북가좌동377-25)	24m	21m	감) 3m	시공물량 차이
24	한강대로(용산구 한강대교북단~삼각지)	8,097m	5,116m	감) 2,981m	재도색 물량 본공사로 작업
25	가양대교(마포구 상암동 구룡사거리)	402m	429m	증) 27m	시공물량 차이
26	백범로(용산구 삼각지 교차로 주변)	289m	241m	감) 48m	시공물량 차이
27	월드컵로(마포구 경기장 주변)	423m	415m	감) 8m	시공물량 차이
28	한남대로(용산구 한남동 한남 오거리)	73m	305m	증) 232m	포장구간 증가로 인한 물량변동

연번	장 소	당 초	변 경	증·감	증·감 사유
29	한강대로(용산구 한강로1가 296-1)	148m	153m	증) 5m	시공물량 차이
30	서소문로(중구 서소문동 ~순화동 5-2)	1,472m	1,367m	감) 111m	포장구간 축소로 인한 물량변동
31	한남대로(용산구 한남동 726-370 주변)	10m	21m	증) 11m	시공물량 차이
32	청파로(중구 중림동 342-1)	85m	57m	감) 28m	시공물량 차이
33	진흥로(은평구 역촌역1번출구)	132m	0m	감) 132m	기 작업되어 있음
34	소월로(용산구 후암동 406-97)	62m	108m	증) 46m	시공물량 차이
35	모래내로(서대문구 홍은동 428)	87m	60m	감) 27m	시공물량 차이
36	통일로(서대문구 홍은동 439-1)	15m	7m	감) 8m	시공물량 차이
37	한강대로(용산구 한강로2가 357-1)	33m	42m	증) 9m	시공물량 차이
38	통일로(서대문구 홍제동 251-4)	9m	2m	감) 7m	시공물량 차이
39	통일로(서대문구 홍제역4번출구)	17m	9m	감) 8m	시공물량 차이
40	다산로(중구 신당동 353-81)	10m	9m	감) 1m	시공물량 차이
41	소공로(중구 소공동 79-2)	11m	9m	감) 2m	시공물량 차이
42	다산로(중구 신당동 청구역1번출구)	85m	230m	증) 145m	포장구간 증가로 인한 물량변동
합 계		25,953m	22,179m	감) 3,774m

○ 소요금액

구 분	당 초	변 경	증·감	비 고
제13차 작업지시	45,507천원	37,506천원	감) 8,001천원

○ 변경사유

- 포장구간 축소로 인한 물량변동 :  6개소

- 포장구간 증가로 인한 물량변동 :  4개소

- 시공물량에 따른 작업물량 차이 : 22개소

- 기작업 완료구간 물량제외      :  2개소

- 재도색물량 본공사로 작업      :  1개소

붙 임 : 1. 제13차 작업완료 내역서 1부.

2. 제13차 작업완료 사진대지 1부.

3. 제13차 작업완료 도면 1부(별도첨부).  끝.