문서번호	도로관리과-2526
결재일자	2015.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	도로포장안전팀장	도로관리과장	도시안전기획관		도시안전본부장
이옥휘	최연우	이택근	권기욱		02/17 조성일
협 조
	도로관리팀장			권완택

안락한 도로환경 제공을 위한

2015년 노후포장도로 정비계획

2015. 2

도시안전본부

(도로관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □ 인권 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

안락한 도로환경 제공을 위한

2015년 노후포장도로 정비계획

노후 포장도로 정비로 내구성 증진, 평탄성 향상 등 『차도 10계명』을  추진하여 시민에게 안락한 도로환경을 제공하고자 함.

Ⅰ		현 황

□ 시도(차도) 현황

○ 도로연장 : 1,159km(전체 연장 8,198km의 14.1%)

○ 관리면적 293,300a(전체 관리면적 836,107a의 35.1%)

□ 최근 5년간 포장도로 유지관리 현황

구 분	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	비고
면 적(a)	19,149	11,618	10,497	19,286	18,114
보수비(억원)	331	316	312	474	480

□ 2015년 사업개요

○ 위  치 : 삼전로 등 77개노선 167개소

○ 규  모 : 연장 157km, 면적 11,313a(시 관리면적의 3.9%)

- 노후포장도로 정비공사 : 연장 141km, 면적 10,589a

- 버스전용차로 정비공사 : 연장   16km, 면적    724a

- 긴급복구 정비공사     : 1식

- 기타 불량맨홀 정비공사 4,000개소 등

○ 총소요예산 : 57,350백만원

○ 사업기간   : 2015.1 ~ 12

Ⅱ		정 비 계 획

□ 추진방향

○ 서울형 도로포장 설계법에 의한 포장도로 내구성 증대

○ 아스팔트 포장공사 품질향상으로 내구수명 증대

○ 관리감독 강화로 시공품질 향상

□ 추진계획

○ 서울형 도로포장 설계법 적용

- 포장도로 상태조사 결과 SPI지수가 6.4이하 지역 우선시행

- 포장공사 설계시 현장조사(코아채취)를 통한 포장단면 설계로 내구성 증대

※ 발주전 사업계획(위치, 두께, 재료, 규모, 시행시기 등) 제출

- 서울형 도로포장 설계법에 의한 정비공사 1개소 이상 실시

○ 아스팔트 포장공사 품질향상 추진

- 1등급 골재 사용 및 소석회 첨가로 도로소파(소성변형, 포트홀) 저감

- 소석회 사용시 시험성적 제출 의무화(시방서 개정 예정)

- 도로소파 잦은 도로(버스전용차로 등)에 내유동성이 우수한 입도(W-5 또는 SMA) 적용으로 평탄성 향상.

○ 예방적 유지보수

- ‘13년~’14년 시공물량에 대하여 성과분석(PMS, 외부전문가 합동조사 등)을 시행한 후 시공계획 수립 시행

- 하도급계약에 따른 간접비용 발생 등 공사품질저하 방지를 위해 별도발주

○ 관리감독 강화에 의한 시공품질 향상

-  시공현장 및 아스콘 생산공장을 대상으로 외부전문가 합동 불시점검 실시

-  열화상카메라에 의한 아스팔트 포장 다짐온도 관리로 고품질 확보

○ 기타 사항은 2014년 추진사항 및 시방서 참조

Ⅲ		예산배정 계획

□ 금회 배정계획

(단위 : 백만원)

예산과목 (통계목)	예산액	배 정 계 획		잔 액	비 고
		금 액	내 용
소 계	57,350	49,282		8,068
사무관리비	130	36	ㅇ 직영반운영 : 36,000천원 - 6,000천원×6개도로사업소=36,000천원 - 직영반 장비 수리비, 유류비, 안전용품 등 구입 ※ 사무실 운영비 등 : 기본경비(사무관리비) 활용 ※ 피복비 : 재무과 인건비 활용(편성됨)	94
재 료 비	636	300	ㅇ 50,000천원×6=300,000천원 - 직영반 운영에 따른 자재비 → 골재, 텍코팅, 상온아스팔트, 가열아스팔트 등	336
시 설 비	55,726	48,126	ㅇ 노후포장도로 정비공사 : 28,826,000천원 ㅇ 버스전용차로 정비공사 : 3,600,000천원 ㅇ 긴급복구(도로함몰) 공사 : 11,000,000천원 ㅇ 불량맨홀 정비공사 : 3,000,000천원 ㅇ 광화문광장 차도 유지보수 : 700,000천원 ㅇ 동공탐사용역 : 1,000,000천원	7,600
감 리 비	700	700	ㅇ동부:354,000천원 ㅇ서부:346,000천원
자산및물품 취 득 비	154	120	ㅇ 열화상카메라 구입 :100,000천원 - 사업소 : 10,000천원×2대×5개사업소 = 100,000천원 ※ 성동 : '14년 2대 구매('15년 제외) ㅇ 열화상카메라, 노트북, 외장형디스크 등 구매 - 도로관리과 : 15,000천원 ㅇ 콤펙터구입 : 성동도로사업소(2대) 5,000천원	34
기타보상금	4		ㅇ 별도계획 수립 시행	4

○ 편성예산 조정

- 증 액(38억) : 버스전용차로 정비 8억원,  긴급복구(도로함몰) 30억원

- 감 액(38억) : 노후포장도로 정비공사 38억원

- 사 유 : 강우 및 중차량에 의한 도로소파 증가, 도로함몰 발생 등으로 버스전용차로 정비 및 긴급복구 예산 증액

○ 사업소별 세부 배정계획 : 별첨참조

□ 배정잔액 활용계획

○ 강우 및 도로함몰로 인한 포장도로 정비(예방적유지보수 포함) : 7,600백만원

- 노후포장도로 정비(예방적유지보수 포함) : 60억

- 긴급복구(도로함몰) 10억

- 불량맨홀 정비 6억

○ 기  타 : 468백만원

- 직영반 운영 및 재료비(하반기)

- 포장도로, 도로함몰 등 자문, 포럼, 시험비 등

Ⅳ		행 정 사 항

□ 추진계획

○ ‘15. 2월 : 예산배정

○ ‘15. 3월 : 공사착공

○ ‘15. 4월 : 직영자재 및 열화상카메라 등 구매

○ ‘15. 4월 ~ 11월 : 공사시행

□ 예산과목

○ 도로시설물 관리, 도로 및 도로시설물관리(도시개발), 노후포장도로 정비공사, 일반운영비(사무관리비), 재료비(재료비), 시설비 및 부대비(시설비, 감리비), 자산취득비(자산 및 물품취득비)

붙 임 1) 사업소별 배정계획 1부.

2) 2015년 노후포장도로 정비공사 계획 1부.

3) 현장조사 현황 1부.  끝.