투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(최종) 시행(2014년 노후포장도로정비공사외 2건 폐아스콘처리용역-서부)

우리사업소에서 시행 중인 『2014년 노후포장도로 정비공사외2건 폐아스콘 처리용역-서부 』에 대하여 아래와 같이 설계변경(최종)을 시행하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 2014년 노후포장도로 정비공사외 2건 폐아스콘처리용역-서부

나. 공사기간 : 2014.05.23 ∼ 2015.2.28

다. 도 급 자 : ㈜도성환경개발 대표 윤훈철

라. 설계변경 금액

(단위 : 원)

구 분		당 초 금 액	변 경 금 액	증 ․ 감	비 고
총공사비		488,560,600	483,246,000	감)5,314,600
용역비	공급가액	444,146,000	439,314,546	감)4,831,454
	부가가치세	44,414,600	43,931,454	감)483,146
	계	488,560,600	483,246,000	감)5,314,600

마. 설계변경 사유

1) 포장도로 긴급복구공사(연간단가) 및 직영반 긴급보수 물량증·감에 따른 폐아스콘 처리 물량 증·감

바. 예산과목

1) 도로관리과, 도로시설물관리, 도로및도로부속시설물관리(도시개발),

노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙임 : 1) 설계변경 검토 보고서 1부.

2) 설계변경 내역서(최종) 1부.  끝.

주무관	최정필		도로보수과장	02/23 이규철
협조자	주무관	홍용현		주무관	이상하		계약1팀장	김점선
시행	도로보수과-1620	(		)	접수		(		)
우	121-834	서울 마포구 가양대로 203	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-300-8355	/전송		/	jp2575@seoul.go.kr	/	대시민공개