의원 요구 자료 제출

시 행	녹색에너지과-3576	(		)
접 수		(		)
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
수 신 자	내부결재

주무관	녹색에너지과장	환경에너지기획관	기후환경본부장		결재
박상현	권민	윤영철	02/23 장혁재
협 조
	신재생에너지팀장			임병욱

제 목	시의원 요구자료제출(요구번호 329번, 한명희 의원, 환경수자원위원회)

따로붙임 :      시의원 요구자료 1부.  끝.

한명희 의원 (환경수자원위원회, 새정치민주연합)

329. 하수열이용 지역난방공급사업 계획, 추진일정 등 상세한 내역

□ 탄천물재생센터 하수열 이용사업 추진 현황

○ 내    용 : 하수열 19만Gcal 이용 (공동주택 2만호 난방공급)

○ 규    모 : 63Gcal/hr (9Gcal/hr 7기 및 부대시설, 지하1층 1,434㎡, 지상 430㎡)

○ 사 업 비 : 373억원(전액 민자출자, 향후 15년간 운영 후 소유권 이전)

○ 사 업 자 : 포스코에너지(운영 : 탄천E&E, 시공 : 포스코ICT)

○ 추진결과 : 시험운전 및 시설준공(´14.12.24부터 한국지역난방공사 열 공급)

□ 서남물재생센터 하수열 이용사업 추진 현황

○ 위    치 : 강서구 마곡동 123번지 (서남물재생센터 내)

○ 규    모 : 32Gcal/hr (8.0Gcal/hr  4기 및 부대시설)

○ 사 업 비 : 약 350억원 <전액 민자출자, 20년간(10년 단위) 운영 후 철거>

○ 추진현황

- ´12.06 : 서남센터 하수열 이용 민간투자사업 제안서 제출(가칭 서남에너지㈜)

- ´13.2~´13.7 : 서남 하수열 이용 지역냉난방공급 민간사업 적격성 조사(공공투자센터)

- ´14.03 : 서남물재생센터 하수열 이용 지역난방 공급계획(부시장 방침)

- ´14.06 : 우선 협상 대상자 선정<(가칭)서남에너지

- ´14.12 : 열수급계약 체결(SH집단에너지사업단)

- ´15.2월까지 : 실시협약 협상 및 법률지원단 자문

작성자	소 속	직 위	성 명
	녹색에너지과	담당사무관	임 병 욱
	☎ 2133-3574	담 당 자	박 상 현
	작 성 일	2015. 2.

○ 향후계획

- ´15.3월 : 실시협약 체결

- ´15.4~8월 : 실시설계 및 착공

- ´16.12~´17.1월 : 시운전 및 준공

이곳에 본문을 입력하세요