투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(한양도성도감과장)
(경유)
제목	'옛시장공관 리모델링 및 한양도성 순성길 연결공사' 설계변경 심의결과 알림

1.『옛시장공관 리모델링 및 한양도성 순성길 조성공사』와 관련입니다.

2. 한양도성 성곽연결 및 건물과의 주변 연계성, 조화로운 조경계획을 위한 설계변경 소위원회(1차) 심의결과 사항을 알려드리니 검토하여 최종 설계서를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 자문결과 지적사항 및 조치결과 : 붙임

나. 조경공사 변경 내역                                   (단위:천원)

구 분	당 초	심의요청 증감액	심의결과 조정금액	조정후 증감액	비고
조경공사	158,375	176,772	119,106	감57,666

붙 임 1. 설계변경 소위원회 심의 조치결과 1부

2. 설계내역서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
★주무관	김재무		조경시설과장	신용우		방재시설부장	02/23 임춘근
협조자
시행	방재시설부-2346	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 청계천로 8(무교동 96) 프리미어플레이스 14층	/
전화	02)3708-8794	/전송	02)3708-8756	/	kjm640@seoul.go.kr	/	대시민공개