문서번호	방재시설부-2325
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
김학지		이도헌	02/23 임춘근
협조
	주무관		조양연

준공기한 연기 검토 보고

《탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 폐기물처리용역(1차)》

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(방재시설부)

준공기한 연기 검토 보고

《탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 폐기물처리용역(1차)》

사업개요

용 역 명 : 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 폐기물처리용역(1차)

용역개요                                             (단위 : 톤)

구 분	총 차	1 차	비 고
폐기물처리 및 운반	3,105	2,135

용역기간 : 2014. 3.18 ~ 2016. 9.29

-1차기간 : 2014. 3.18 ~ 2015. 2.28

용 역 비 : 90,653,000원(1차 62,247,000원)

용 역 자 : ㈜도성개발

감 리 자 : ㈜ 유신

\

관련근거

관련근거 : 탄천감 15-19(2015.2.23.)

- 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 건설폐기물처리용역(1차)     준공기한 연기요청

준공기간 연기사유

연기사유

- 탄천물재생센터 복개공사(4단계)작업시 필요한 타워크레인의 작업계획변경으로 기초철거 폐기물 물량이 미발생됨에 따른 절대공기부족

변경내용

구 분	당 초	변 경	비 고
1차	2014. 3.18 ~ 2015. 2.28	2014. 3.18 ~ 2015. 9.30

연기에 따른 귀책소재 : 발주처

지체상금 부과여부 : 미부과

조치계획

탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 책임감리원이 제출한 준공기한 연기요청건에 대하여 내용검토 한 바 타당하기에 준공기한을 연기하여 용역추진에 만전을 기하고자함

붙임 : 건설폐기물처리용역(1차분) 준공기한 연기요청서 1부. 끝.