내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	동작대교 및 한강대교 건설폐기물 처리용역 설계변경 시행

1. 서울시 시설관리공단 공사감독2처-1551호(2015. 2.23)와 관련입니다.

2. 우리시에서 시행중인 「동작대교 및 한강대교 보수공사 건설폐기물 처리용역」에 대하여 아래와 같이 설계변경(총차3회, 3차1회)을 시행하고자 합니다.

가. 용 역 명 : 동작대교 및 한강대교 보수공사 건설폐기물 처리용역

나. 용역기간 : (총차) 2012. 7.18 ~ 2015. 2. 28

(3차) 2014. 3. 5 ~ 2015. 2. 28

다. 도 급 액 : 총차 114,260,000원 (3차 21,200,000원)

라. 도 급 사 : (주)대길공영 외 1개사

마. 감 독 자 : 서울특별시 시설관리공단(공사감독2처)

바. 예산과목

- 교량관리, 한강교량관리, 동작대교보수공사, 시설비 및 부대비,

시설비(‘14년 예산 21,200,000원)

사. 설계변경내역

1) 총차분(제3회 변경)                           (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감액	비 고
총 용 역 비		114,260,000	94,430,000	감)19,830,000
도급액	공급가액	103,872,727	85,845,455	감)18,027,272
	부 가 세	10,387,273	8,584,545	감) 1,802,728
	계	114,260,000	94,430,000	감)19,830,000

2) 3차분(제1회 변경)                          (단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증·감액	비 고
총 공 사 비		21,200,000	18,730,000	감)2,467,000
도급액	공급가액	19,272,727	17,027,273	감)2,245,454
	부 가 세	1,927,273	1,702,727	감) 224,545
	계	21,200,000	18,730,000	감)2,467,000

아. 설계변경사유

- 물량 정산에 따른 변경 등

붙임 : 설계변경 관련 공문서(서울시 시설관리공단) 1부.  끝

	서 울 특 별 시 장
수신자	재무과장,서울특별시 남부도로사업소장(관리단속과장)
주무관	임동운		특수교량팀장	이수근		교량안전과장	02/23 이용심
협조자	계약1팀장	김점선
시행	교량안전과-2690	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관1동 2층 교량안전과	/
전화	2133-1952	/전송		/	lduon@seoul.go.kr	/	대시민공개