문서번호	기전과-2264
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	기전과장
양상규		박태진	02/23 박재경
협조

『2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사』

설계변경(2차) 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

강서도로사업소

기 전 과

『2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사』

설계변경(2차) 계획 보고

우리사업소에서 시행 추진하고 있는『2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사』관련 동절기에 따른 토목공사 지연으로 공기 내 준공할 수 없어 공기 연장하고자 검토 보고합니다.

공사개요

❍ 공 사 명 : 2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사

❍ 위    치 : 가마산지하차도 상부(구로구 가만산로 141)

- T-GIS교차로명 : 하늘공원주차장

❍ 공사내용 : 회전교차로 설치사업에 따른 차량지주 3본 철거

※ 교통신호기 설치사업은 구로구청 교통행정과에서 별도 시행

❍ 도 급 비 : 금1,475,100원(금일백사십칠만오천일백원)

❍ 계약업체 : 진흥전력설비(주) 대표자 서정웅

❍ 공사기간 : 2013.11.21 ~ 2015.02.28.

현 상황

❍ 구로구청 교통행정과에서 시행하는 선행공정인 토목공사가 진행되고         있지 않아 교통신호기 공사(철거공사)를 공기 내 준공할 수 없는 실정임.

검토결과

❍ 2014년 회전교차로 설치 교통신호기 공사중 기존 차량지주 철거         공사는 우리부서에서 시행 추진하고 있으며, 교통신호기 설치사         업은 구로구청 교통행정과에서 추진하고 있음.

❍ 선행 공정인 토목공사가 진행되어야 철거공사를 할수 있는 실정이므로         구로구청 교통행정과 토목공정 진행상황에 따라 공사 추진코자 함.

❍ 공사기간 연장

- 당초 : 착공일로부터 100일(2014.11.21.~2015.2.28)

- 변경 : 착공일로부터 222일(2014.11.21.~2015.6.30) (122일 연장)

행정사항

❍ 공사기간 연장 변경계약 요청.  끝.