문서번호	교통정책과-3507
결재일자	2015.2.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		교통혁신팀장	교통정책과장
김경환		이수진	02/23 이원목
협 조
	민자사업팀장			정회원
	주차시설팀장			김종상
	중앙차로팀장			김종호
	철도계획팀장			노병춘
	교통개선팀장			유승효

위례신도시 광역교통개선대책 사업 관련 정기 주민협의 회의 개최 계획 보고

2015. 2

도시교통본부

(교통정책과)

정기 주민협의 회의 개최 계획

(위례신도시 광역교통개선대책 사업 관련)

2014년 7월 위례지구 현장시장실 운영시 광역교통개선대책 추진에 따른 “정기 주민협의 건의” 요청한 사항과 관련하여 광역교통개선대책 17개 사업의 추진현황을 설명하고 주민의견을 수렴하기 위하여 ‘상․하반기 정기 주민협의 회의’를 개최하고자 합니다.

추진배경

○ 2014. 7월 위례지구 현장시장실 운영시 광역교통 계획 추진에 대한 정기 주민협의 건의사항에 대한 검토

※ 위례신도시 광역교통개선대책 사업(총 21개 사업)

- 완료사업 : 위례성길 연결로 확장 외 3개 사업

- 진행중인 사업 : 탄천변도로 신설 외 16개 사업

진행중인 위례신도시 광역교통개선대책 17개 사업 현황

구분	사업명	시행주체	사업규모	추진현황	비고
도로시설	탄천변도로 신설	LH	○ 연장 : 1.1km, 4차로 ○ 사업비 : 1,450억원	실시계획인가 협의 (2015. 10월 착공)
	우남로 확장		○ 연장 : 0.4km, 6→8차로 ○ 사업비 : 220억원	실시계획인가 협의 (2015. 6월 착공)
	지구북측 도로 신설		○ 연장 : 2.5km, 6차로 ○ 사업비 : 2,460억원	실시계획인가 협의 (2015. 4월 착공)
	감일～초이간 도로		○ 연장 : 1.3km, 6차로 ○ 사업비 : 1,130억원	감일지구와 연계 추진 (2015. 12월 착공)
도로시설	장지동길 신설	SH	○ 연장 : 0.4km, 4차로 ○ 사업비 : 380억원	설계 중 (2016. 1월 착공)
접속시설	장지교삼거리 입체화		○ 연장 : 1.1km, 4차로 ○ 사업비 : 1,080억원	공사중(공정률 72%) (2016. 1. 30. 준공)

구분	사업명	시행주체	사업규모	추진현황	비고
도로시설	성남외곽순환도로 확장	성남시 (도로과)	○ 연장 : 6.9km, 4→6,4차로 ○ 사업비 : 3,200억원	2014년 3월 1단계 실착공
도로시설	제2양재대로 신설	서울시 (도로 계획과)	○ 연장 : 5.2km, 4차로 ○ 사업비 : 3,200억원	계획수립 중 (민자추진)
	헌릉로～삼성로간 신설		○ 연장 : 3.7km, 4차로 ○ 사업비 : 1,900억원	계획수립 중 (노선검토 후 추진)
접속시설	장지동길 T.S.M	서울시 (교통 운영과)	○ 연장 : 2.6km, 4차로 ○ 사업비 : 20억원	설계 중 (장지동길 신설과 연계)
대중교통시설	헌흥로 중앙 버스 전용차로		○ 연장 : 9.7km ○ 사업비 : 120억원	계획수립 중
환승시설	환승센터 설치(복정역)	서울시 (주차 계획과)	○ 사업비 : 1,010억원	계획수립 중	교통정책과 설계용역 협조
대중교통시설	공영차고지 이전	LH	○ 사업비 : 500억원	관계기관 협의 중	주차계획과 협조
접속시설	송파IC 개선	도로공사	○ 사업비 : 1,380억원	실시설계 중 (2015년 6월 착공)
철도시설	우남역 신설	도시철도공사(토목처)	○ 사업비 : 460억원	설계 중
	신교통수단 도입(위례선)	민자사업자	○ 연장 : 5.44km ○ 사업비 : 1,800억원	서울시도시철도기본계획 수립 중
	위례~신사선		○ 연장 : 14.83km ○ 사업비 : 14,253억원

주민참여 “정기 주민협의 회의” 개최 계획

○ 회의일시 : 연 2회(상반기 – 2~3월, 하반기 – 9~10월 중 1회 개최)

○ 참 석 자

- 사업별 시행주체 : 서울시 관련 부서, LH, SH, 성남시, 도로공사 등

- 단지대표 : 주민대표 10명 내외

○ 회의내용 : 광역교통개선대책 사업별 추진현황 설명 및 주민의견 청취

2015년 상반기 주민협의 회의 개최 계획

○ 회의일시 : 3월 11일(수) 16:00

○ 장    소 : 송파구 위례광장로 163 위례22단지 주민공동시설

○ 참 석 자 : 광역교통개선대책 사업별 담당자(팀장) 및 주민대표(10명)

○ 회의내용

- 각 사업별 추진현황, 문제점 및 개선방안 보고

- 주민의견 청취 및 건의사항 제시

○ 진행순서

시 간	내 용	비 고
16:00~16:05 (5´)	․개회 및 인사 말씀	교통정책과장
16:05~16:50 (45´)	․각 사업별 추진현황 보고(부서별 5분 내외)	사업별 담당자(팀장)
16:50~18:00 (70´)	․질의응답 및 주민의견 제시 ․사이버 공간(인터넷 카페) 운영에 대한 설명 및 의견 청취

○ 기타안건

- 사이버 공간(인터넷 카페) 등을 활용한 광역교통개선 추진현황 시민소통창구 운영계획에 대한 의견 수렴

향후 추진계획

○ 2015. 2. 25. : 2015년 상반기 정기협의 회의 개최 알림

○ 2015. 3. 11. : 정기협의 회의 개최

○ 2015. 3. 13. : 회의결과 건의사항 각 사업시행자에게 통보

○ 2015. 3~4월 : 인터넷카페 운영계획 수립 및 추진

(회의 시 주민 및 사업시행자 의견 반영)

○ 2015. 9~10월 : 2015년 하반기 정기회의 개최

붙임  사업별 추진현황 보고 양식 1부.  끝.

【붙임】

사업명

□ 사업개요

○ 위    치 :

○ 시 행 자 :

○ 규    모 :

○ 총사업비 :

○ 사업기간 :

□ 추진현황

○ 2015. 1.  :

□ 문제점(지연사유)

○

□ 해결방안

○

□ 향후계획

○