문서번호	보건의료정책과-3013
결재일자	2013.1.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	보건의료정책과장	보건정책관		복지건강실장
박양호	박유미	김창보		01/25 김경호
협 조	보건정책팀장		윤재삼
	시립병원운영팀장		구장회

시립병원 종합개선 프로젝트 추진사항 보고

2013. 1. 22

복지건강실

(보건의료정책과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(	교수 등	)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 □
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	보건복지부	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	기업	:	유 □	(		)	무 □
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 □
	●	시산하기관	:	유 ■	(	시립병원장 및 실무팀장	)	무 □

시립병원 종합개선 프로젝트 추진사항 보고

Ⅰ. 사업개요

□ 추진기간 : ‘12. 10. 1 ~ ‘13. 3. 31

□ 과업범위 : 직영병원, 서울의료원 및 민간위탁 시립병원 5개소 총 9개소

※ 민간위탁 정신병원 4개소 제외

□ 과업내용 : 시립병원 공공성 효율성 향상을 위한 종합개선 마스터플랜 수립

※ 과제내용 : 총 6개 (서울시립병원 역할 정의, 시민 체감형 서비스 디자인 등)

□ 전체 공정율 : 계획 30%,  추진실적 30%

Ⅱ. 사업 추진 성과

□ 과제별 핵심 활동 진척율

단위 : %

과제	핵심활동	책임연구원	계획	진척율	차이
추진배경 및 추진 계획 수립	•전체회의를 위한 추진배경 및 경과 정리 •추진계획 및 추진과제 재검토	종합개선 실무팀	30	30	0
T1. 서울시립병원 역할 정의	•기본의료 기반 확충을 위한 병상공급목표 설정	고재현	50	50	0
T2. 단위시립병원 기능 정립	•기초자료 수집(중점의료 영역별 역할 검토) •인사이트 팀 운영계획 수립(템플릿 작성)	고재현	10	10	0
T3. 책임경영체계 구축	•접근방법 및 분석 대상 설정, 기초자료 수집	최은석	20	20	0
T4. 인재육성체계 구축	•기초자료 수집을 위한 서식, 템플릿 작성 •분석 대상, 분석 틀 설정을 위한 문헌 고찰	소예경 양민희	20	20	0
T5. 관리운영체계 구축	•지방의료원, 국공립병원 거버넌스 혁신 사례 분석 •운영체계 개선에 따른 기대효과 검토	최은석	20	20	0
T6. 시민 체감형 서비스 디자인	•서비스 디자인 혁신과제 수행 협의체 구성 등 •국내외 체감형 서비스 우수사례 검토	박은영 배상명	20	20	0

□ 금주 추진사항

○ 시립병원 종합개선 전체 T/F팀 착수회의 실시

- 장    소 : 서울시신청사 5층 공용회의실

- 참석대상 : 총괄위원회 위원, 병원장, 외부전문가, 병원실무자 등 50명

○ 갈렙 연구용역 활동사항

- 7대 혁신과제별 세부추진과제 도출

- 예산보조금 지급기준 개선 용역 현황분석 및 결과 공유 회의자료 작성

□ 금주 생산된 성과물

○ 제1차 전체 T/F팀 회의자료(사업추진계획, 시보조금 지급기준 연구검토사항) : <별첨1>

Ⅲ. 의사소통 활동내용

□ 회의결과(연구사항) 공유 및 배포

○ 배포대상 : 전문가 그룹 (병원장, 외부전문가) 19명

○ 배포방법 : 전체 T/F팀 회의 시 자료 배포 ※ 미참석자 개인메일로 전송

○ 배포내용

- 추진배경 및 경과, 세부추진계획 PT자료

- 병원별 현황통계 및 기초자료 수집을 위한 조사표 작성 및 협조사항

- 서울특별시립병원 예산보조금 지급기준 개선 현황분석결과 : 시립병원장 배포

□ 이해관계자 의견수렴 내용

○ 시민단체, 병원노조 등 : 없음

○ 전문가그룹 : 전체 T/F  회의록 <별첨2>

○ 서울시(복지건강실장 당부사항)

- 공공병원의 역할에 대해 시립병원 뿐 아니라 국립병원도 포함 공공의료기반 분석 도출

- 시립병원의 역할에 대해 서울시 36.5 제시된 질환치료, 예방, 건강격차 해소 지속적 역할 강조

- 병원과 보건지소의 네트워킹, 사회복지와 의료가 연결되도록 고려 추진

Ⅳ. 사업 위험 관리

□ 이슈사항

○ 시립병원 종합개선 프로젝트 세부 추진 일정 확정 필요

-  종합계획(초안) 완료일자, 시장님 중간보고 일자, 시장님 대시민 발표일자 등

○ 핵심과제(T7) 재정 건전화 방안 개발(수익증대방안, 비용절감방안, 재정확충방안)

수행기간 '13. 3. 31까지 계획 작성 포함 여부 명확화 필요

□ 추진상의 애로사항 : 없음

Ⅴ. 향후 계획

□ 실무위원회 회의 : ‘13. 1. 24(목) 10:00~12:00

○ 회의장소 : 보라매병원 지하 1층 공공의료 TFT 회의실

○ 회의안건 : 시립병원 종합개선 프로젝트 혁신과제별 진행상황 보고 및 실무논의

○ 참 석 자 : 서울시 보건의료정책과, 권영대 교수, 정기현 교수, 윤상철 대표,

모현희 원장, 갈렙 2명, 공공보건의료지원단 4명 총 12명