문서번호	조경과-1198
결재일자	2013.1.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	조경시설팀장	조경과장		푸른도시국장
이정수	한정훈	이원영		01/28 오해영
협 조

2013년 도시구조물 벽면녹화 추진 계획

푸른도시국

(조  경  과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 ■	(		)	무 □
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	서울시도시녹화조례	)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 ■ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	자치구	)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

2013년 도시구조물 벽면녹화 추진 계획

도시가로변 콘크리트옹벽, 방음벽, 절개지, 담장 등 구조물의 벽면에 덩굴성 식물을 식재, 피복ㆍ녹화함으로써 부족한 생활권의 녹지를 도모함은 물론 가로의 녹색비율을 증진시켜 쾌적한 도시경관 창출

Ⅰ		기 본 방 향

서울시 전역을 대상으로 가로변 미관저해 구조물 전면녹화 시행

그간 시도로 중심 추진에서 구도로까지 포함 점진적 확대 추진

다양한 식물과 함께 복합적 식재기법으로 조기녹화 유도

기 식재지에 대한 생장촉진 및 조기 피복을 위한 비배관리 강화

녹화효과 극대화를 위해 타 녹화사업과 연계추진

Ⅱ		추진개요

대 상 지 : 가로변 콘크리트 옹벽, 석축, 방음벽, 담장 등의 구조물

사업내용 : 화단설치, 담쟁이, 헤데라 등 덩굴식물 및 초화류, 수목식재 등

사업기간 : 1999 ~ 2014(계속사업)

소요예산 : 31,269백만원(기투자 25,859, ‘13년 1,410, ’14년이후 4,000)

추진현황

구 분	계	기투자 ('99~'10)	2011	2012년	2013년	2014이후
개 소 수	1,063	847	56	52	33	75
조성면적(㎡)	104,253	75,299	6,206	4,494	6,254	12,000
길 이(m)	176,639	135,863	11,400	6,000	7,376	16,000
사업비(백만원)	31,269	21,604	2,348	1,907	1,410	4,000

2012년까지 종로구 평창동 북악터널 등 955개소 153,263m 조성

Ⅲ		‘13년 사업계획

추진방향

사계절 녹색의 미관이 유지될 수 있도록 소재의 다양화

대상지별 식재지 특성에 부합되는 녹화기법 적용

시비ㆍ보식 등 사후관리에 역점을 두어 생육증진 도모

금년부터 인센티브 평가대상에 반영 추진

사업개요

위    치 : 성북구 종암로 옹벽 등 28개소

규    모 : 5,550㎡(연장 6,607m)

사업내용 : 화단설치, 담쟁이 등 덩굴식물 및 초화류, 수목식재 등

사업기간 : 2013. 1 ~ 12월

사 업 비 : 1,410백만원(시설비 1,407, 시설부대비 3)

예산과목 : 조경과, 생활주변녹지확충, Green Way조성으로 도시녹지벨트 조성, 녹지벨트 구축, 도시구조물벽면녹화, 시설비(401-01)

추진방법

신규대상 지역

- 설계단계부터 타 녹화사업, 자치구 사업 등과 연계하는 추진방안 검토

- 단순공정 사업으로 자체 설계를 통한 사업예산 절감

- 설계용역이 요구될 경우 기술용역 타당성심사 결과 반영하여 배정 요구

- “도시구조물 벽면녹화 유형별 녹화지침”에 의한 사업 추진(별첨)

- 예산이 많이 수반되는 특수공법은 지양 ⇨ 구조물 녹화 위주로 단순계획

- 지역 주민의 사업참여, 관리방법 개선 등 참신한 아이디어 적극 수렴

녹화완료지역 관리 강화

- 이른 봄철(3월초순~4월초순) 식재지에 부숙퇴비 시비 ⇨ 조기피복 유도

- 고사 수목은 즉시 제거하고 신속한 보식 조치

- 기타 식물생장 유도를 위한 등반보조재 등 안전점검 철저

추진절차

사업계획 시달(市) ⇨ 설계시 타사업과 연계모색, 주민 참여 홍보(자치구) ⇨ 설계심의, 아이디어 발굴 등(市, 자치구) ⇨ 공사비 배정 ⇨ 공사시행

추진일정

2013. 1월       : 사업계획 수립 및 시달

2013. 2 ~ 3월 : 설계용역 및 설계심의, 공사비 재배정

2013. 4 ~ 10월 : 공사발주 및 시행

※ 조기집행 대상사업으로 2012. 6월까지 준공목표로 추진

Ⅳ		예산잔액 활용계획

예산잔액 : 169백만원(조경과 유보금)

발생사유 : 구도로는 서울시보조금관리조례에 의거 매칭사업으로  추진할 계획이었으나 예산변경(시설비→자치단체자본보조) 불가로 잔액 발생

집행계획 : 예산범위내에서 사업대상지(시도로) 추가 발굴 시행

추진방법 : 2013년 7월까지 사업대상지 신청받아 대상지 선정 추진

Ⅴ		벽면녹화 확대방안

2012. 10월 가로변 구조물 벽면녹화 미조성지에 대한 전수조사 실시

25개 자치구를 통해 시도로는 물론 구도로까지 포함하여 일제 조사

조사결과 중구 금호동길 등 67개소 16,000m 발굴(사업비 3,800백만원)

※ 2014년 도시구조물벽면녹화 사업대상지로 우선 선정하여 집중 녹화

서울시 전역을 대상으로 가로변 미관저해 구조물 집중 녹화 전개

그간 시도로 중심에서 향후 구도로까지 포함하여 점진적 확대

자치구 재정을 고려하여 구도로는 서울시와 매칭사업으로 추진

가로변 사업을 통해 발생되는 모든 구조물은 설계반영하여 녹화시행 유도

※ 누락된 벽면녹화 미조성지는 지속적으로 발굴․녹화 실행

벽면녹화 확대 유도를 위해 인센티브 가점 부여

금년도부터 푸른도시국 인센티브 평가 대상에 반영 시행

Ⅵ		행정사항

사업착공 및 준공시 5일 이내 사업내역 첨부 보고(별첨 서식)

설계심의 결과에 따라 공사비 조정 배정

사업과정에서 시민참여 등 행사 추진시 행사계획 첨부 시설부대비 배정 요청

벽면녹화 확대시행에 따라 사업대상지 지속 발굴․녹화 시행

2013년 푸른도시국 자치구 인센티브 사업 평가 대상에 반영 시행예정

첨  부 1. 도시구조물 벽면녹화 유형별 녹화지침 1부.

2. 2013년 자치구별 사업대상지 1부.

3. 착공(준공) 보고서식 1부. 끝.