문서번호	물재생시설과-8419
결재일자	2013.6.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	물재생시설과장	물관리정책관	도시안전실장		행정2부시장
김태환	김병위	정만근	김병하		06/27 문승국
협 조
	법무담당관			정석윤
	재무과장			박근수
	물재생기전팀장			강재천
	물재생운영팀장			정훈모

서남 바이오가스 열병합발전사업 협약

2013. 6

도시안전실 물재생시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(	한국지역난방공사	)	무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	재무과, 법무담당관	)	무 □
	●	민간단체	:	유 ■	(	(주)서남환경	)	무 □
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

서남 바이오가스 열병합발전사업 협약

□ 저탄소녹색성장 정책에 부응하고 원전하나줄이기 시책사업을 위하여 추진중인 서남 바이오가스 열병합발전사업 협약 보고임

☞ 사업비 172억, 가스 기준단가 177원/N㎥, 전력가격 및 발열량 연동

Ⅰ		사업개요

❍ 사업내용 : 바이오가스를 열병합발전 연료로 활용하여 전기 및 열 생산

❍ 사 업 비 : 172억원(사업자 전액투자), 사업기간 20년

❍ 사 업 자 : 한국지역난방공사컨소시엄(서남바이오에너지주식회사)

❍ 사업위치 : 서남물재생센터내 약 2,000㎡

❍ 발전용량 : 5.8MW(3MW×1대, 1.4MW×2대)

- 가스공급량 : 52,000㎥/일 (2011년 평균)

- 전력생산 : 전력 38,700MWh 및 열 36,000Gcal 생산

- 에너지 절감효과 : 12,073TOE (온실가스 26,273톤CO2)

❍ 경 제 성 : 61억원/년 [운영비 24억, 순이익 37억(서울시 29, 사업자 8)]

- 운영비(24억/년) : 감가상각비(9억), 유지보수비 등(13억), 법인세(2억)

※ 열병합발전 공정도

Ⅱ		사업추진 현황 및 계획

❍ '12.7월 : 사업추진계획 방침(행정2부시장) 및 사업제안 공고

❍ '12.8월 : 사업제안 평가[한국지역난방공사컨소시엄, GS파워(주)]

❍ '12.9월~'13.2월 : 우선 협상대상자 선정(한국지역난방공사컨소시엄) 및 협상

❍ '13.3월~6월 : 협약서(안) 재무과 계약심사단 심사 및 법무담당관 검토

❍ '13.6월 : 서남 바이오가스 공급 및 수급에 관한 협약체결

❍ '13.7월~'14.9월 : 열병합발전시설 설치 및 바이오가스 공급․판매

Ⅲ		협약서 요약

□ 사업형태

❍ 서울시는 부지제공 및 자가소비용 바이오가스를 제외한 전량을 사업자에 공급

❍ 사업자는 열병합시설 설치 및 운영․관리, 소화조 가온용 열 무상공급

□ 바이오가스 판매가격

❍ 기준단가 : 177원/N㎥

- 2011년 가스공급량(52,000㎥/일), 발열량(5,513kcal/N㎥), 전력가격(SMP, 125원/kWh), 신재생에너지 발전보조금(REC, 40원/kWh) 등을 고려하여 산출

❍ 가스사용료 : 당해연도 전력가격, 신재생에너지 발전보조금, 바이오가스 발열량 등을 기준단가에 반영하여 산출(매월)

❍ 조정금액 : 운영비 물가변동 및 가스공급량 변동에 따른 사용료 조정(분기별)

- 기준운영비(2012년) 대비 당해연도 소비자물가지수 변동율 및 기준가스량(52,000㎥/일)과 실제 가스공급량과의 차이로 인해 발생한 수익변동액

Ⅳ		행정사항

❍ 사업추진 시 안전사고 예방관리 철저 및 긴밀한 협조체계 유지

❍ 경관개선 및 소음저감을 위하여 반지하화 추진(비용 최소화, 가스사용료에서 차감)

붙임 : 시설위치도, 경제성 분석, 가스사용료 산정기준, 협약서 각 1부. 끝.