투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	2014년 관내포장도로굴착복구 폐아스콘처리용역 설계변경(최종) 계약 의뢰

1. 우리 사업소에서 시행중인 ‘2014년 관내포장도로굴착복구 폐아스콘처리용역-동부’에 대한 설계변경(최종)을 시행하고 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 2014년 관내포장도로굴착복구 폐아스콘처리용역(야간)-동부

나. 용역기간 : 2014.04.07 ~ 2015.02.28

다. 도 급 자 : ㈜삼보ENT 김완기 외 1개사

라. 설계변경 내역

구 분		변 경 내 역			비 고
		당 초	변 경	증, 감
총 용역비		124,003,000	117,997,000	감 6,006,000
도급비	공급가액	112,730,000	107,270,000	감 5,460,000
	부가가치세	11,273,000	10,727,000	감 546,000
	계	124,003,000	117,997,000	감 6,006,000

마. 변경사유 : 포장도로 굴착복구공사시 발생되는 폐아스콘 물량에 대한 정산

바. 예산과목 : 도시안전실, 도로관리과, 도로시설물관리, 도로굴착복구, 도로굴착복구지원, 시설비및부대비, 시설비

붙임 : 1. 설계변경 시행문 1부.

2. 설계변경 검토보고서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시 동부도로사업소장
주무관	이문희		주무관	박일연		도로보수과장	02/24 김환겸
협조자
시행	도로보수과-1156	(		)	접수		(		)
우	135-280	서울 강남구 남부순환로 3142-33(대치동 2번지) 동부도로사업소	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2040-0352	/전송	02-2040-0307	/	twodoor@seoul.go.kr	/	대시민공개