문서번호	설비부-2266
결재일자	2015.2.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		건축설비과장	설비부장
배수웅		김영수	02/24 박기형
협조

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

(서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사)

2015.  2.

설  비  부

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

(서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사)

서남권 돔야구장 주변 보행자 전용도로 설치 전기공사 관련, 선행공종(토목) 지연에 따른 관급자재 납품기한 연기에 대한 검토 보고임.

사업개요

□ 건    명 : 터널용 등기구 외 11종 구매

□ 납품기한 : 2015. 2. 28

□ 계약업체 : ㈜한영전기 외 6개사

실정보고 내용

□ 납품기한 변경내용

품 명	계 약 자	계약금액(원)	납품기한		비 고
			당 초	변 경
도로조명설비	㈜한영전기	77,431,050	2015.02.28	2015.06.30
가로등주 및 부속자재	에이컴조명(주)	55,282,150	2015.02.28	2015.06.30
도로조명설비	㈜이텍	11,056,430	2015.02.28	2015.06.30
거주로조명설비	㈜썬레이	62,496,970	2015.02.28	2015.06.30
분전반	㈜두리계전	9,840,220	2015.02.28	2015.06.30
메탈할라이드램프 외 5종	㈜강산조명	47,335,990	2015.02.28	2015.06.30
가로등주 및 부속자재	㈜정원엘피	1,317,720	2015.02.28	2015.06.30

□ 연기사유 : 선행공종(토목) 지연에 따른 관급자재 설치시기 미도래

□ 지체상금 부과 여부 : 미부과(납품사 귀책사유 없음)

조치의견

□ 선행공정 지연으로 관급자재 납품기한 연기가 불가피 함.

□ 납품기한 변경내용에 대해 계약부서인 건설총괄부에 연기 의뢰코자 함. 끝.