투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	준공기한 연기의뢰(탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 폐기물처리용역)

1. 우리본부에서 시행중인 「탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 건설폐기물처리용역(1차)」의 준공기한을 아래와 같이 연기의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 탄천물재생센터 복개공원화(4단계)공사 건설폐기물처리용역(1차)

나. 용 역 비 : 62,247,000원

다. 용 역 자 : ㈜도성개발  대표  박진영

라. 준공기한 연기

구분	당 초	변 경	비고
1차	2014.3.18.~2015. 2.28	2014.3.18.~2015.9.30

〇 연기에 따른 귀책사유 : 서울특별시 도시기반시설본부

〇 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 1) 준공기한 연기검토보고서 1부.

2) 준공기한 연기의뢰서 1부.

3) 합의각서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	김학지		방재시설과장	이도헌		방재시설부장	02/24 代이도헌
협조자	주무관	조양연		계약2팀장	홍연화
시행	방재시설부-2371	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 중구 청계천로8(무교동96번지) 프리미어플레이스빌딩 14층	/
전화	02)3708-8765	/전송	02)3708-8756	/	hjk570@seoul.go.kr	/	대시민공개