문서번호	관리과-2408
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		김홍덕	02/25 김동기
협 조

제어시스템 소프트웨어 설치 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  2.

중랑물재생센터

(관리과)

제어시스템 소프트웨어 설치 계획

정보통신보안 강화를 위해 제어시스템용 단말기의 운영체제를 윈도우XP에서 윈도우7으로 교체하고 제어시스템 소프트웨어 업그레이드를 실시하여 사이버 침해사고에 대비하고자 함

Ⅰ		추진배경

MS사 ‘윈도우XP’ 보안패치 지원중단에 따라 ’윈도우7‘ 교체 후 SW업그레이드 조치 요청(정보통신보안담당관-1790, ‘14.1.28)

2014년 주요정보통신기반시설 취약점 분석ㆍ평가 결과 ‘윈도우XP’ 기반 운영자 컴퓨터 보안 취약점에 대한 보호대책 수립 요청

기존 제어시스템 소프트웨어는 윈도우XP용으로 윈도우7으로 변경 시 시스템이 정상적으로 작동되지 않아 소프트웨어 업그레이드를 실시하여야 함

Ⅱ		사업개요

기     간 : ‘14. 10. 30 ~ ’15. 3. 13

대     상

- 제어시스템 운영자용 단말기 10대

- ONS(Open Network Server)용 단말기 4대

계 약 일 : 2014. 12. 29(납품기한 : 2015. 02. 17)

납품업체 : 주식회사 효성(대표 이상운)

소요예산 : 100백만원

내     용

- 단말기 운영체제를 윈도우XP에서 보안이 강화된 윈도우7으로 교체

- 제어시스템 OIS 및 ONS Software Package 납품 및 업그레이드 실시

Ⅲ		추진현황

‘14. 10. 30 : 제어시스템 운영체제 교체 계획 수립

‘14. 11. 11 :「제어시스템 소프트웨어 구매설치」계약심사 요청

‘14. 11. 14 ∼11. 19 : 수입물품 및 특정제품 선정 심사위원회 개최

‘14. 11. 28 ∼ 12. 22 : 입찰공고(4회) ⇒ 결과(유찰)

‘14. 12. 29 : 수의계약(주-효성)

‘15. 02. 16 : 제어시스템 소프트웨어 납품완료

Ⅳ		현안문제

제어시스템 소프트웨어 업그레이드 대상 단말기는 총 14대로 이 중 6대는 기존 단말기에 설치하고 8대는 노후되어 신규 단말기로 교체 후 설치토록 하였으나 신규 단말기 4대의 구매가 지연되어 납품기한(‘15.2.17) 내에 설치 및 시운전을 완료하지 못함

Ⅴ		조치방안

기존 단말기(6대) 및 구입된 신규 단말기(4대)에 대하여 소프트웨어 업그레이드를 우선 실시하고 단말기 4대를 조속히 구매하여 소프트웨어 설치 및 시운전을 완료토록 함

「지침서」일반사항 제2항제12호 및「시방서」구매내역 제2항제2호에 따라 소프트웨어 설치 및 시운전 완료까지 현장기술지원토록 계약자(주-효성)에게 요청(붙임1 참조)

Ⅵ		향 후 일 정

‘15. 02. 25 ~ 03. 06 : 제어시스템 단말기 4대 구매

‘15. 03. 04 ~ 03. 06 : ONS 4대 업그레이드 및 시운전

‘15. 03. 09 ~ 03. 13 : OIS(with SVR) 2대, OIS 8대 업그레이드 및 시운전

붙임  1. 확약서 1부.

2. 물품구매 지침서 및 시방서 1부. 끝.