문서번호	시설과-1194
결재일자	2015.2.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
손영민	공헌구	전결 02/25 심상원
협 조
	운영과장		이행용
	조경과장		이성주
	추진반장		代김형집
	주무관		한상길

「 2015년 서울대공원 」

해빙기 대비  취약시설 (지역 ) 점검 ․ 정비 계획

2015. 2

서울대공원

(시설과)

「 2015년 서울대공원 」

해빙기 대비  취약시설 (지역 ) 점검 ․ 정비 계획

2015년 해빙기를 대비하여 공원내 절개지, 축대, 옹벽, 노후 불량건물 등에 대하여 철저한 점검․정비로 안전사고 예방에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		관련근거

□ 2015년 서울대공원 시설물 안전관리 추진계획(시설과-788호, ‘15.2.6)

□ 2015년 안전점검의 날(해빙기 안전대책) 운영계획(건설안전과-1630호, ‘15.2.4)

Ⅱ		추진개요

□ 추진기간 :  2014. 2. 26 ~ 4. 10

□ 점검대상 : 서울대공원 관리 시설물, 민자(위탁)시설물, 공사장

구분	토목분야 (시설)	건축분야 (건물)	전기분야 (변전소)	소방분야 (옥내소화전)	기계분야 (기계실)	유희시설	공사장
계	26개소	306동	39개소	76개	34개소	41기종	4개소
직 영	20개소	176동	15개소	63개	33개소	-	4개소
민자․위탁	6개소	130동	24개소	13개	1개소)	41기종

□ 점검방법

○ 1 차 : 각 분야 시설물 관리부서 담당점검

○ 2 차 : 간부 합동점검

□ 주요 점검사항

○ 해빙기 대비 도로, 동물사, 건축물 등 시설물 파손 및 붕괴

○ 축대, 옹벽, 절개지, 공사장 등 안전점검

○ 보일러, 온풍기, 전기히터 등 난방기기 안전관리 및 소방시설 점검

Ⅲ		추진계획

□ 1차 : 사전 점검․정비

◦ 점 검 자 : (대공원)시설물 관리부서장․담당자 / (민자․위탁시설) 자체

◦ 점검기간 : ‘15. 2. 26 ~ 3. 9

◦ 점검방법 : 점검표 및 점검요령(붙임)에 따라 시설물 현황 파악 및 점검․정비

◦ 정비기한 : ‘15. 3. 18한

□ 2차 : 중점 점검․정비

◦ 점 검 자 : 관리부장, 운영과장, 시설과장, 조경과장, 기반시설 안전추진반장,

각 시설물 담당총괄 주무관

◦ 점검기간 : ‘15. 3. 19 ~ 3. 25

◦ 점검방법 : 1차 점검결과 미조치된 사항과 주요 취약시설(사면 등) 현장 점검

◦ 정비기한 : ‘15. 4. 10한(기간 내 정비가 곤란한 경우 정비계획 별도 수립)

□ 추진일정

구분	공정		2월			3월					4월
점검․정비	1차	점검		부서(업체)별 자 체 점 검			(3.9한)
		정비			지적사항 정비			(3.18한)
	2차	점검						간부합동 점검반 점검		(3.25한)
		정비							지적사항 정비			(4.10한)

Ⅳ		조치계획

◦ 경미한 지적사항은 시설(준)공무직 및 조경전문인력 활용 즉시 정비

- 보도블록 정비, 시설물 페인트 도색, 사면내 폐잔목 제거 등

◦ 규모가 크거나 예산이 수반되는 사항은 연간단가 보수업체 활용 정비

◦ 축대, 옹벽 등의 균열 등 붕괴 우려 시 긴급안전점검 추진 및 응급조치

Ⅴ		행정사항

□ 점검 및 조치결과 제출

◦ 1차점검 및 조치결과 ⇒ 담당과장 주관 부서‧업체별 자체시행

- 점검대상 및 지적사항 조치결과 : ‘15.3.18한 (점검부서․ 업체 → 시설과)

◦ 2차점검 및 조치결과 ⇒ 간부합동 점검반 구성시행

- 점검시설 현황 및 지적사항 조치결과 : ‘15.4.10한 (점검부서 업체 → 시설과)

- 공원점검 및 정비결과 제출 : ‘15.4.10한 (시설과 → 공원녹지정책과)
※ 기간 내 정비가 곤란한 경우 정비계획 포함

□ 안전점검 결과 중대한 결함사항 조치

◦ 구조적 균열, 붕괴 등의 징후가 발견 될 경우 응급조치 및 긴급점검 시행

◦ 필요시 재난관리기금 등을 활용하여 우기 전까지 완료될 수 있도록 조치

붙임 : 1. 안전점검결과 제출양식 1부.

2. 안전점검 및 보수요령(예시) 1부. 끝.