문서번호	마곡조성담당관-8482
결재일자	2013.11.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목계획팀장	마곡조성담당관		마곡사업추진단장
마승래	서귀동	하종현		11/01 서노원
협 조

단지조성 공정점검(14차) 결과 보고

2013. 11.

마곡사업추진단

(마곡조성담당관)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(		)	무 □
	●	전문가	:	유 ■	(		)	무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 □ 재해 ■
				기타 □	(		)	무 □
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(		)	무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	SH공사	)	무 □

단지조성 공정점검(14차) 결과보고

Ⅰ		점검개요

일   시 : ′13.10.31(목) 15:30

장   소 :  마곡 1공구 현장사무실

참 석 자 : 마곡조성담당관 (토목계획팀장, 담당)

SH공사 (토목조경팀 담당)

현장소장, 현장감리단장 (1▪2공구, 빗물펌프장)

안   건 : 단지조성 공정 진행상황 점검 및 추진대책

〔공정현황〕

○ 단지조성공사 : 공정률 52.4% ('13.10월말 현재)

- 간선하수박스   : 1,115m중  1,075m 완료 (96.4%)

- 공동구(1공구)   : 1,158m중    985m 완료 (85.0%)

(2공구)  : 1,506m중  1,352m 완료 (89.8%)

○ 신설 빗물펌프장 : 공정률 24%

- 펌프장 구조물 : 2펌프장 구조물 2단 벽체 철근 및 거푸집 조립

- 토출암거 : 올림픽대로 BTR 강관 추진

Ⅱ		점검결과 및 조치

빗물펌프장 공사관련 올림픽대로 통과부분 강관 추진시 안전사고가 발생되지 않도록 철저한 안전대책 수립 및 공사 관리감독 철저

9호선 마곡나루역 북측 출입구는 도시기반시설본부와 협의하여 조속 설계 및 공사 추진

공항로 구조개선 공사관련 아파트 입주대비 도로 개통에 지장이 없도록 지하시설물간 공정계획 수립 및 공정관리 철저.  끝.