투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 변경계약 요청[2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사]

1. 도로보수과-1815(2015.2.25)호와 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 「2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)-북부」에 대하여 아래와 같이 설계변경(정산) 시행하고 변경계약을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2014년 세종로 차도구간 일상유지보수공사(연간단가)-북부

나. 계 약 일 : 2014. 5. 15

다. 공사기간 : 2014. 5. 15 ~ 2015. 2. 28

라. 도 급 자 : ㈜사림엔지니어링 대표 이영걸

마. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		설계변경 금액		증․감	비 고
		당 초	변 경
총공사비		720,000,000	710,999,270	감)9,000,730
도급비	공급가액	533,454,546	533,454,546	-
	부 가 세	53,345,454	53,345,454	-
	계	586,800,000	586,800,000	-
관 급 비		113,200,000	113,107,270	감)92,730
이 전 비		20,000,000	11,092,000	감)8,908,000

바. 설계변경 사유 : 공종별 정비물량 및 제경비 정산 등

※ 별첨 설계변경사유서

사. 예산과목 : 도로시설물관리, 도로 및 도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로 정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 품의서 1부.

3. 설계변경시행계획서 1부.

4. 변경설계서 1부.

5. 합의각서 1부. 끝.

	서울특별시 북부도로사업소장
주무관	최진규		도로보수과장	02/25 이석재
협조자
시행	도로보수과-1818	(		)	접수		(		)
우	142-060	서울시 강북구 한천로 913(번동) 북부도로사업소 도로보수과 별관 2층	/
전화	029445433	/전송	029455072	/		/	대시민공개