투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	하도급 『(주)정암토건』 계약 내용 변경 알림

『구리암사대교연결도로』의 하도급 계약이 변경 체결되어 아래와 같이  현황을 알려드립니다.

-   아     래   -

하도급사	공 종		하 도 급 내 용 (금액단위 : 천원)				비고
			원도급액 (예정가격)	하도급액	비율(%) 원도급(예가)	공사기간
㈜정암토건	토공사	당초	5,037,700 (6,386,600)	4,237,300	84.11 (66.35)	2013.09.02. ~ 2015.06.30.
		변경	4,200,900 (4,846,000)	3,789,000	90.19 (78.18)	2013.09.02. ~ 2015.01.31.
		증감	감) 836,800 ( 감) 1,540,600)	감) 448,300	-	감) 5개월
상기 하도급 변경계약은 해당공사 완료에 따라 시공 수량을 정산 하는 것임.

붙  임 : 1. 검토보고서 1부(별도 송부).
2. 하도급계약 통지서 1부(별도 송부).  끝.

	토목부장
★주무관	손영란		광역도로과장	진재섭		토목부장	02/25 노우성
협조자
시행	토목부-3871	(		)	접수		(		)
우	100-777	서울 중구 천계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2560	/전송	02-3708-2599	/	syoungran23@seoul.go.kr	/	대시민공개