문서번호	자원순환과-3628
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
정인수		정연구	03/10 최홍식
협조

노원자원회수시설 2호기 가동중지 및 정비계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 03.

자원순환과

노원자원회수시설 2호기 가동중지 및 정비계획 보고

노원자원회수시설 2호기 소각로의 “연소화격자” 탈락(4번)으로 정상 가동

연소에 문제점이 발생함에 따라 안정적 운영을 위하여 소각로 일시 가동

중지후(3일소요) 점검 및 보수코자 함

□  근  거

○ 노원자원회수시설 소각로(2호기) 긴급 가동중지 계획(안) 보고

- 노원한불 14-73호(2014. 3. 8)

□  보고내용

○ 2호기 연소화격자 탈락 소각중지

- 6개의 연소화격자 중 (4번)측의 연소화격자 일부가 탈락(빠짐) 되어            화격자의 회전운전이 불가능한 상태임

(4번) 화격자에 설치된 화격자 수량	탈락(빠짐)된 화격자 수량	비 고
880개	20여개	소각로(2호기) 총화격자 설치수량 : 5,280개 ※880개 x 6 = 5,280

※1호기는 정상 운전(가동률 80%)

○ 고장 발생 원인

- 반입폐기물 중에 혼입된 고철이나 저장조 청소를 위한 바닥 잔여쓰레기           소각 중, 바닥에 가라앉은 철재, 돌 등의 폐기물이 투입되면서 화격자            손상 추정

○ 현황도 및 사진

(4번)화격자 탈락 1 2 3 4 5 6 소각연소실 배출구 막힘
화격자 탈락, 소각재 배출구 막힘	화격자탈락 현황사진

□  정비계획

○ 정비방향

- 탈락(빠짐) 화격자 재설치 조립

- 재 배출구 고착된 클린커 제거

○ 정비기간중 운전현황

소각중지	재가동	비 고
2014. 03. 8 (토) (14:00 폐기물투입 중지)	2014. 03. 13 (목) (22:00 폐기물투입 소각)	소각로 중지기간 (4일)

□  행정사항

○ 운영사 소각로 가동 중지 승인 통보

○ 운영사 조치 사항

- 소각로 정비 완료 후 조치결과 제출

- 주민지원협의체 소각로 가동중지 사항통보

따로 붙임 : 운영사 가동중지 계획 보고 1부.  끝.