투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사 중도타절 및 채권채무확정검사 결과 알림(2013년 개봉고가차도 보수공사-강서)

1. 우리사업소에서 2013년 예산으로 추진중인 『2013년 개봉고가차도 보수공사-강서』와 관련입니다.

2. 위 공사는 계약자(도급자)인 예도건설(주)의 부도(법정관리 개시 이후 회생계획인가여부 미결정) 상태로 준공기한(2013.12.31)을 도과하여 계약보증이행 청구기간 만료일인 2014.2.28.까지 재계약(준공기한 연기)이 체결되지 않아 공사계약 일반조건 제44조(계약상대자의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 및 해지)에 의하여 2014.2.28.자로 공사 중도타절하고, 보증기관인 우리은행(주)에 계약보증이행을 요청하였으며,

3. 공사 중도타절에 따른 채권채무확정검사 결과는 아래와 같음을 알려드리니, 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

채권채무확정검사 결과-

가. 검사일시 : 2014.3.7.(금) 15:00 ~ 16:00

나. 장    소 : 개봉고가차도 현장(구로구 개봉동 353)

다. 참 석 자 : 발주처(강서도로사업소), 공사감독(시설관리공단), 하도급자((주)삼우아이엠씨)

※ 미참석한 계약자(도급자 예도건설(주)), 보증기관(우리은행(주))는 확정검사 결과에 동의하겠다고 유선으로 확인함

라. 채권채무확정검사 결과

1) 기성물량 : 바닥판 재포장 567㎡, 공간비계 260㎡

2) 타절금액 : \47,000,000원 (도급자 18백만원, 하도급자 129백만원)

- 타절금액은 계약금액 752,984,900원은 19.5%임

- 전회(1차)기성 129백만원 지급완료(‘14.1.9. 하도급직불)

- 금회(2차)기성  18백만원 미지급(도급자분)

3) 지체상금 : \35,753,109원

4) 정산금액 : \(-)17,753,109원

- 기성과 지체상금 상계후 도급자가 발주처에 납부하여야 하는 금액임

※ 산출근거 : 【타절금액 - 전회(1차) 기성지급액】- 지체상금

붙임 : 1. 채권채무확정검사 결과 및 향후계획(방침)

2. 채권채무확정검사 기성조서.

3. 공사 중도타절 및 보증이행 요청 공문사본.  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장),서 울 특 별 시 장(도로시설과장)
주무관	류춘광		시설보수과장	03/17 김권일
협조자
시행	시설보수과-2023	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 강서구 양천로 237(마곡동67-1) 강서도로사업소 시설보수과	/	www.seoul.go.kr
전화	2657-7971	/전송	2657-7970	/	rckng@seoul.go.kr	/	부분공개