투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	중부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	납품기한 연기요청

1. 공원운영과-16710(2013.8.26)호와 관련입니다.

2.『################### 제작구매 설치』관련 아래와 같이 납품기한을 연기요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 사업개요

- 계 약 명 : #################### 제작구매 설치

- 계약금액 : 20,837,300원

- 계약업체 : #############

- 계약일자 : 2013.12.04

- 납품기한 : 2014.04.03

나. 납품기한 연기사항

- 당   초 : 2014. 04. 03

- 변   경 : 2014. 12. 10(120일 연기)

다. 연기사유

- ##########관련 전문가 자문회의 개최결과 사업기간 연장에 따른 납품기한 연기 (공원조성과-3123, 2014.03.14)

라. 지체상금 부과여부 검토

- 연기사유 귀책소재 : 중부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 1) 납품기한 연기검토보고서 1부.

2) 납품기한 연기의뢰서 1부. 끝.

	시설과장
주무관	김광기		시설팀장	김영백		시설과장	03/25 함석주
협조자
시행	시설과-1963	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울특별시 중구 삼일대로 231	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-3783-5961	/전송	02-3783-5969	/	korea114@seoul.go.kr	/	부분공개(5)