문서번호	설비부-3244
결재일자	2014.3.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	녹색성장과장	설비부장	시설국장
이재홍	김창균	박기형	전결 03/27 이광세
협 조
	경리과장			최영미

『율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사』

설비분야 공사시행 계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3

도시기반시설본부

(설 비 부)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

『율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사』

설비분야 공사시행 계획 보고

우리 본부에서 추진하는 『율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사』 관련, 설비분야(전기,통신) 공사시행 계획에 대해 보고 드림.

1		공 사 개 요

공 사 명 : 율곡로 창경궁앞 도로구조 개선공사

위    치 : 종로구 권농동 7(창덕궁) ~ 종로구 원남동 166(원남동 사거리)

공사규모 : 도로확장 폭30m(4차로→6차로), 연장 810m(지하차도 300m)

주요설비 : 지하차도등 516등, 보행등 400등, 가로등 31등, CCTV설비,

재방송설비(라디오), 소방설비, 기타 배관배선 등

공사기간 : 2014. 4 ~ 2015. 6. 30

공 사 비 : 2,538천원(전기 2,337천원, 통신 201천원)

2		추 진 경 위

2010. 06 : 실시설계 완료

2010. 10 : 토목공사 착공

2014. 01 : 계약심사 완료(전기, 통신)

2014. 03 : 전력구 이설(한국전력공사)

※ 현재 토목 공정율 36%

3		공사발주 계획

분야별 공사비

(단위 : 천원)

구 분	공 사 비			1차공사 발주금액
	계	전 기	통 신
계	2,538,000	2,336,640	201,360	250,000
도 급 비	1,452,536	1,316,437	136,099	242,781
관 급 비	758,633	693,372	65,261
이 설 비	326,831	326,831		7,219

입찰방법 및 참자자격

분 야	입찰참가 자격 및 방법	비 고
전 기	○ 전기공사업과 소방시설공사업(전문 또는 전기) 모두 등록업체 단, 전기공사업만 등록한 업체는 소방시설공사업체와 공동도급(분담이행방식) 가능 ○ 서울특별시에 주된 영업소를 둔 자(이하 “지역업체”)를 반드시 공동수급체 구성원으로 하여야하며, 지역업체의 최소 시공참여비율은 49%이상이어야 함 단, 지역업체가 상기 자격요건을 갖춘 경우 단독 입찰가능. ○ 공동이행 및 분담이행(소방)방식의 공동도급이 가능하며 공동 수급체의 수는 3개사 이내로 하며, 공동수급체 대표는 출자비율·분담내용의 비중이 큰 업체로 함	자격 지역의무 공동도급 공동계약
통 신	○ 정보통신공사업 등록업체로서 입찰공고일 전일부터 계약체결일까지 주된 영업소재지가 서울특별시에 소재한 업체	지역제한

낙찰자 결정

□ 결정방법 : 시설공사 적격심사

‣ 시설공사 적격심사 세부기준(안전행정부 예규 제20호)에 의함

계약방법 : 장기계속계약

예산과목

도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 율곡로(창경궁앞) 구조개선,

시설비

4		향후 계획

2014. 3월 : 공사 발주

2014. 4월 : 공사 착공.  끝.