투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	하도급 재계약통보(917공구 기계설비공사)

1. 유탑기감 2014-195(2014. 4. 3)호와 관련입니다.

2. 우리본부에서 턴키공사로 사업추진중인 지하철9호선2단계 917공구 건설공사의 기계설비공사(소방공사포함) 하도급 재계약이 감리단으로부터 검토제출되어 아래와 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 지하철 9호선2단계 917공구 건설공사

ㅇ 계 약 자 : GS건설(주) 외 2개사

ㅇ 공사기간 : 2008.6.2 ~ 2014.8.31

ㅇ 계약금액 : 총 118,963백만원

나. 하도급 재계약 내용

ㅇ 사  유 : 당초 하도급업체인 ㈜한산기연의 기업회생절차신청  등 법정관리로 인한 공정관리에 어려움이 있어 정산타절로 인한 추가 재계약

(단위:천원)

분 야	하도급사	하도급 부분금액	하도급액	하도급율	하도급 기 간	비 고
기계설비 (소방포함)	한산시피에스(주) 김용강,이기웅	4,231,940	3,598,240 (부가세별도)	85.03%	2014.2.10 ~ 2014.8.31

붙임 : 하도급 계약서류(별도송부) 1부. 끝.

	도시철도설비부장
주무관	장병선		설비계획과장	황철호		도시철도설비부장	04/07 정찬웅
협조자
시행	도시철도설비부-3278	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울시 중구 삼일대로 231 남산별과 4층 도시철도설비부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02)772-7295	/전송	02)772-7308	/		/	대시민공개