투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기·통신·신호공사)

우리 본부에서 시행 중인 「서부트럭터미널 앞 지하차도 건설 전기·통신·신호공사」 의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 공사개요

구 분	전기공사	통신공사	신호공사
위 치	양천구 신정3동 735-5번지 일원(서부트럭터미널 앞)
공사기간	‘10.12.15 ~ ’14.04.15	‘10.11.29 ~ ’14.04.15	‘10.11.29 ~ ’14.04.15
공사금액	2,985,360천원	795,281천원	325,449천원
시 공 사	(주)금호전력	(주)삼삼통신기술	(주)우남전설
감 리 사	(주)동일기술공사 외 1개사

2. 준공기한 연기의뢰 현황

공사구분	차수	계약금액(원)	당 초	변 경	비 고
전기공사	총차	2,985,360,000	‘10.12.15 ~ ’14.04.15	‘10.12.15 ~ ’14.07.20	96일 연기
	3차수	2,418,360,000	‘12.07.19 ~ ’14.04.15	‘12.07.19 ~ ’14.07.20	“
통신공사	총차	795,281,630	‘10.11.29 ~ ’14.04.15	‘10.11.29 ~ ’14.07.20	“
	3차수	775,281,630	‘12.07.16 ~ ’14.04.15	‘12.07.16 ~ ’14.07.20	“
신호공사	총차	325,449,000	‘10.11.29 ~ ’14.04.15	‘10.11.29 ~ ’14.07.20	“
	3차수	267,520,000	‘12.07.17 ~ ’14.04.15	‘12.07.17 ~ ’14.07.20	“

3. 연기사유 : 선행 공정인 토목공사 지연으로 인한 전기 ․ 통신 ․ 신호공사 시공여건 미조성

4. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 1. 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 합의서 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	건설총괄부장,서 울 특 별 시 장(재무과장)
주무관	김홍석		시책사업과장	이흥복		설비부장	04/10 박기형
협조자	경리과장	최영미		계약1팀장	김점선
시행	설비부-3860	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관 2동 2층)	/	http://smih.seoul.go.kr/
전화	3708-8646	/전송	3708-8659	/	khs25@seoul.go.kr	/	대시민공개