투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	총무과장
(경유)
제 목	담비 스라소니 전시장 조성공사 준공기한 연기 의뢰

1. 조경과-2139(2014.4.18)호와 관련입니다.

2. ‘담비 스라소니 전시장 조성공사’의 준공기한을 아래와 같이 연기 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 담비 스라소니 전시장 조성공사

나. 공사위치 : 소동물관 외부 및 녹지대 일부

다. 공사내용 : 노란목도리담비, 스라소니 전시장, 관람시설 조성 등

라. 계약금액 : 금367,790,500원

마. 도 급 자 : ㈜매일 대표 조현철

바. 준공기한 연기

○ 변 경 전 : 2013.4.16. ~ 2014.4.20.

○ 변 경 후 : 2013.4.16. ~ 2014.4.30.

○ 연기사유 : 간부 합동점검시 지시사항 보완 등에 따른 절대 공기 부족

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한 연기 검토보고(원장방침), 준공기한연기의뢰서 각 1부.  끝.

	조경과장
주무관	이옥하		조경과장	04/19 이성주
협조자
시행	조경과-2146	(		)	접수		(		)
우	427-702	경기 과천시 대공원광장로 102 서울대공원 조경과	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	500-7550	/전송	500-7993	/		/	대시민공개