문서번호	체육진흥과-5096
결재일자	2014.4.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	생활체육정책팀장	체육진흥과장	문화체육정책관		문화관광디자인본부장
이재익	최병윤	오제성	황치영		04/28 한문철
협 조
	물재생시설과장			代천정남
	난지물재생센터소장			정흥순
	체육정책팀장			정경숙

『난지 야구장 건립 기본계획』 수립을 위한 조사 용역 계획(안)

2014. 4.

문화관광디자인본부

(체육진흥과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 ■	(	난지주민지원협의체	)		무 □
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 ■ 환경 ■ 재해 ■
				기타 ■	(	투자심사, 도시계획변경결정 등	)		무 □
	●	기타사항	:	고용효과 ■ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 ■
				유지관리 비용 ■ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 ■	(	국토해양부	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	경기도, 고양시	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	난지물재생센터	)		무 □
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『난지 야구장 건립 기본계획』 수립을 위한 조사 용역 계획(안)

개발제한구역내 위치한 난지물재생센터에 생활 체육시설 야구장 건립 관련 기본계획 수립을 위하여 조사 용역을 시행하고자 함.

Ⅰ		추진배경

○ 야구동호인의 증가로 야구장 건립을 요구하는 민원의 지속적 증가와 필요성이 대두되고 있으나, 대규모 부지 확보가 어려움

○ 난지물재생센터내 유휴부지에 대한 야구장 건립 방안 검토 결과 개발제한구역 관리계획변경과 도시계획시설결정 등 사전행정절차가 필요함

○ 난지 야구장 건립에 따른 각종 사전행정절차의 종류와 처리절차, 조성비용 파악 등을 통하여 야구장건립 기본계획 수립에 반영하고자 함.

Ⅱ		추진근거 및 현황

□ 추진근거

○ 체육시설의 설치·이용에 관한 법률 제4조(국가와 지방자치단체의 의무)

○ 『체육시설 확충 종합계획』(행정1부시장 방침 제531호, 2013.12.16)

○ 『2014년 생활체육시설 확충 실행계획』(본부장 방침, 2014.03.12)

□ 대지현황

○ 대지현황

대지위치	고양시 현천동 673-3일대
대지면적	약98,000㎡
지역지구	자연녹지지역, 개발제한구역, 하수도
	문화재보존영향검토대상구역(행주산성) 비행안전5구역, 제한보호구역 과밀억제권역
지 목	잡종지
용 도	나대지(물재생센터부지)
재산관리관	난지물재생센터⇒체육진흥과

※ 중앙부분은 재활용분리 수거장으로 현재 이용하지 않고 있음(콘크리트 포장 약 15,000㎡)

Ⅲ		용역개요

□ 용 역 명 : 『난지 야구장 건립 기본계획』수립 조사 용역

□ 용역기간 : 2014. 05. ~ 2014. 07.(2개월)

□ 계약방법 : 일반경쟁입찰

□ 소요예산 : 61백만원

- 예산액 : 1,473백만원

- 과  목 : 시민체육 및 국제스포츠 진흥발전, 시민체육공간 지속적 확충 및 운영 효율화, 생활체육시설확충, 시설비(100-401-01). 축구장, 농구장 등 생활체육시설 조성

Ⅳ		주요 과업내용 등

□ 야구장 조성에 대한 기본 조건 제시

○ 공원야구장 형태, 성인구장 규격으로 최소 4면이상

○ 편의·안전·관리 등 기본 필수 시설 설치 계획

○ 바닥 맹암거를 설치하지 않고, 다짐 후 마사토와 잔디로 마감

○ 내부도로와 주차장의 포장은 친환경 자재로 포장

□ 주요 과업내용

과업내용	세부내용	비 고
야구장 조성 기본적인 구상안 제시	- 야구장4면 설치에 대한 구상안 - 편의·안전·관리 등 기본 필수 시설 설치 계획 - 함께 설치할 수 있는 유사종목의 제안 - 부지내 수목에 대한 이전 계획 - 접근성과 주변환경 등을 검토한 입지타당성 - 진입도로 위치 및 확보방안 제시
사전행정 절차 파악	- 개발제한구역내 관리계획 변경절차, 도시관리계획시설 결정,도시관리계획시설(하수도) 변경절차 관련 용역내용과 소요기일 - 문화재 형상변경 및 지표조사 절차 및 관련 용역내용과 소요기일
비용 산정	- 실시 및 기본설계 용역에 따른 비용 각 사전행정절차에 필요한 용역비용 - 사업시행과 관련한 각종 부담금 산정 - 개략적인 관리 인력 소요와 관리 비용 산정
고양시청 협의사항 검토	- 고양시청과 협의사항 및 처리대책 제시
기 타	- 난지물재생센터의 환경개선계획과 저촉사 항여부 검토 - 수도·전기·난방 등 간선시설 현황과 인입방안, 인입에 따른 각종 부담금

Ⅴ		주요 추진일정(안)

○ 2014. 04 : 기술용역 타당성 심사

○ 2014. 05 : 난지 야구장 건립 기본계획 수립을 위한 조사 용역 발주

○ 2014. 07 : 용역 준공

○ 2014. 08 : 난지 야구장 건립 기본계획 수립

○ 2014. 09 : 투·융자심사, 시의회 공유재산심의, 기술용역 타당성 심사

○ 2014. 11 : 기본 및 실시설계 용역 발주

따로붙임 1) 설계서 1부.

2) 고양시청과 협의사항

3) 현장사진 1부. 끝.

현장사진